문서번호	행정지원과-2341
결재일자	2020.2.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
방만천	강정환	02/04 代강정환
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

정산보고서 2차-최종

(비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사)

2020. 2. 4.

서부수도사업소

【행정지원과】

정 산 보 고 서

서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사에 대한 2차(최종) 정산을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

2020. 2. 4.

보고자 공업7급 방만천

제목: 정산보고(2차-최종)

❏ 공사현황

❍ 공 사 명: 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

❍ 계약기간: 2019. 10.14.~12.20.

- 준공검사일자: 2020.02.04.(지체상금부과일수 46일)

❍ 계약금액: *************

❍ 도 급 자: ***************

❏ 정산현황

❍ 정산기간: 2019.12.21. ~ 2020.02.04.

❍ 기성내역(요약): 기대기식 옹벽, 낙석방지망, 현장정리 등

❍ 금회(2차)기성청구금액: *************

- 지체상금액         : ************(계약금액 × 0.05% × 지체일수)

- 금회정산금액       : *************

❏ 정산내역

(단위: 원)

계약금액 (A)	정산내역				총지급금액 (F=B+E)	잔 액 (A-F)
	기정산 금액(B)	금회(2차-최종) 기성
		기성청구금액 (C)	지체상금부과금액 (D)	금회정산금액 (E=C-D)
***********	**********	**********	*********	**********	***********	**********

❍ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 수선유지교체비, 수선유지비(사고이월예산.)

붙임  1. 정산내역서(최종) 1부.

2. 준공(기성)검사 조서 1부.

3. 실공사금액 및 산업안전보건관리비 검토결과서 각1부.

4. 지연배상금 상계 기준 1부.

5. 정산자료 1부.