＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	정산 시행(비탈면(팔각정하부) 보수보강공사-2차, 최종)

우리사업소에서 시행하는 “서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사” 에 대한 정산(최종)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

나. 도 급 자: *****************

다. 계약기간: 2019. 10.14.~12.20.

- 준공검사일자: 2020.02.04.(지체상금부과일수 46일)

라. 정산(최종)기간: 2019.12.21. ~ 2020.02.04.

마. 정산금액: ************

바. 정산내역

(단위 : 원)

계약금액 (총부기금액 (A))	정산내역				총지급금액 (F=B+E)	잔 액 (A-F)
	기 정산금액 (B)	금회 정산금액(2차,최종)
		기성청구금액 (C)	지체상금부과금액 (D)	금회 정산금액 (E=C-D)
***********	**********	**********	*********	**********	***********	**********
지체상금부과산출근거 = 계약금액(165,340,690) × 지체상금율(0.05%) × 지체일수(46)

사. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 수선유지교체비, 수선유지비(사고이월예산)

아. 하자담보 책임기간: 준공검사일로부터 5년간

따로붙임 1. 정산(최종)내역서 1부.

2. 준공검사조서 1부.

3. 실공사금액 및 산업안전보건관리비 검토결과서 각1부.

4. 지연배상금 상계 기준 1부.

5. 정산보고서(2차-최종) 1부.

6. 정산자료 1부. 끝.

★주무관	방만천		행정관리팀장	강정환		행정지원과장	代강정환		서부수도사업소장	02/04 박영헌
협조자	주무관	구자람
시행	행정지원과-2396	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)