문서번호	시설관리과-2434
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설운영팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
윤혜정	박종일	천성훈	01/31 이재호
협 조
	주무관		노운학
	주무관		박윤선
	주무관		홍민표
	주무관		서영인

「동대문구, 중랑구 관내 상수도공사」

교통소통대책 수립용역 발주계획 보고

2020. 1.

동부수도사업소

「동대문구, 중랑구 관내 상수도공사」

교통소통대책 수립용역 발주계획 보고

2020년도 동대문구, 중랑구 관내 상수도관 정비공사와 관련하여 도로점용 공사로 인한 시민 불편을 최소화하기 위한 교통소통대책 수립을 위한 용역 발주 계획을 보고드림

□ 용역개요

❍ 용역명: 동대문구, 중랑구 관내 상수도공사 교통소통대책 수립용역

❍ 용역대상 개요

연번	공 사 명	노 선 명		연장(m)	점용 기간	시행구분	비고
1	******* *************	****	**	50	5	야간	동대문구
2	**************	****	**	30	5	야간
3	****************** **********	***	**	125	15	야간
4		****	**	210	15	야간
5		****	**	50	5	야간
6	****************** *********	***	**	91	5	야간
7	********* *********	***	**	665	90	야간
8	********************	***	**	800	90	야간	중랑구
9	*****************	***	**	24	5	야간
10		***	**	75	10	야간
11	****************** *********	***	**	45	10	야간
12	********** *****	***	**	20	5	야간
13		****	**	160	10	주간
14	**************** *********	*****	**	50	5	주간
15		******	**	245	15	주간
16		*******	**	215	15	주간
17		*******	**	200	10	주간
18		*******	**	320	15	주간

※ 시청 교통운영과 권고에 따라 자치구별 별도 대책 수립

관련공문: 교통운영과-7222(2018.04.27.)호 [붙임4]

□ 추진계획

❍ 용역 추진계획 방침 → 기술용역 타당성 심사요청(본청 기술심사담당관) → 용역발주 → 계약 → 교통소통대책자문회의 심의 → 승인통보→공사 착공

□ 용역내용

❍ 용역목적: 공사 중 교통대책의 질적 향상을 도모하고 도로점용 공사로 인한 시민 불편 최소화

❍ 추진근거

- 서 울 특 별 시  도로점용 공사장 교통소통 대책에 관한 조례 제3조(적용대상) 3호

- 서울특별시 동대문구 도로점용 공사장 교통소통 대책에 관한 조례 제3조(적용대상) 2호

- 서울특별시 중 랑 구 도로점용 공사장 교통소통 대책에 관한 조례 제3조(적용대상) 2호

❍ 과업범위: 상수도관 매설을 위한 이동식 도로 점용

❍ 주요 과업 내용

- 교통소통대책 계획 요약서

- 사업지 주변 교통시설 설치 계획 및 교통 관련 계획

- 교통 현황 및 분석

- 공사로 인한 교통영향 분석

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 1. 31. 교통처리용역 타당성 심사 요청(시청 기술심사담당관)

❍ 2020. 2. 7.  심사 결과에 의한 용역 발주

❍ 2020. 2. 17. 용역착수(착수일로부터 30일)

붙임: 1. 설계서 1부.

2. 위치도 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 관련공문 1부.  끝.