“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	서울창업카페 낙성대점 조성 소방공사 계약변경 의뢰 (준공기한 연장)

1. 투자창업과-1209(2020.1.30.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리 부서에서 추진중인「서울창업카페 낙성대점 조성 소방공사」에         대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 서울창업카페 낙성대점 조성 소방공사

나. 계약업체 : *********

다. 계약금액 : **********************

라. 준공기간 변경

- 당 초 : 2019.12.20 ~ 2020.2.2

- 변 경 : 2019.12.20 ~ 2020.2.14.(증12일)

붙임 1. 준공기한 연장 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	투자창업과장
주무관	신재영		창업기반조성팀장	고중석		투자창업과장	01/31 최판규
협조자
시행	투자창업과-1212	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-4762	/전송	2133-0710	/		/	부분공개(5)