문서번호	기반시설과-271
결재일자	2020.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		代정창수	02/03 代손창열
협 조

성수대교북단외2개소승강기설치공사

(성수대교북단 자전거도로 우회공사 실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.  .

한강사업본부 시설부

- 성수대교북단외2개소 승강기설치공사-

(성수대교북단 자전거도로 우회공사 실정보고)

『성수대교북단외2개소승강기설치공사』추진중 성수대교북단 공사부지

협소에 따른 공사장 확보를 위한 자전거도로 우회작업에 대한 보고임.

⇒ 한강제2020-005호(2020.1.31.)

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 성수대교북단외2개소 승강시설치공사(장기계속)

❍ 공사개요

- 도급비 : 3.244.489천원

- 관급비 : 60,702천원천원

- 기 타 : 616,257천원(전기,기계)

❍ 공사기간 :‘19. 11.4 ~ ‘20.12.20

❍ 시공사 : 명남종합건설외외1개사 대표 박남재

Ⅱ		현황 및 문제점

❍ 현 황

현 장

활용구간

‐ 성수대교북단 하부 승강기 및 E/V설치공사현장의

작업공간은 B=4.0m~7.0m로 매우 협소하고 또한

자전거도로와 인접해 있음

‐ 기존 도로현황은 자전거도로 B=4.0m, 보행로

B=2.0m,토사구간 B=0.5~1.5m,배수로 B=1.0m로 형성

❍ 문제점

‐ 기초강관파일의 위치가 자전거도로와 1.3m로 근접해 있음에 따라 파일천공장비의 규모(3.6~8.5m)가 커 작업시 스윙 반경등으로인한 자건거 및 보행인의 안전사고의 위험노출

‐ 설계시 SHEET-PILE 시공시공 구간이 자전도로를 침범하고 있어 자전거도로의 점용이 불가피 함.

Ⅲ		시공사 보고사항

❍ 상기와 같은 공사부지 협소로 인한 문제점이 노출됨에 기존 자전거도로중 1개차로 B=2.0m를 점용하여 공사추진 하고,

자전거도로 점용으로인한 조치는 기존 보도(B=2.0m,토사구간B=0.5~1.5m,

배수로 B=1.0m를 활용하여 자전거도로와 보행로를 L=50m우회작업후 공사 추진

Ⅳ		공사비 증․감내역(개략)

(단위:천원)

구 분	공사비 증․감			비 고
	당 초	변 경	증․감
합 계	0	25,740	증25,740
직접공사비	0	18,324	증18,324
제경비	0	7,416	증 7,4196

Ⅴ		조치계획

❍ 실정보고 검토한바 공사장부지 협소로 인한 공사추진의 문제점 해소와 공사로 인한 한강공원이용시민의 안전을 도모하기 위해 자전거도로를 일부 점용하여 공사시행하고 보행로와 토사구간 및 배수로를 활용하여 우회노선 확보 실시하여 공사를 진행함이 타당할 것으로 사료되며,

증가물량에 대하는 승인하고 추후 설계변경시 정산 반영코자 함.

❍ 공사비 증가부분은 잔여 이설비로 처리코자 함.

붙임 : 실정보고 1부. 끝.