문서번호	교통운영과-1901
결재일자	2020.2.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	광화문광장교통대책팀장	교통운영과장	보행친화기획관		도시교통실장
백바름	이유국	강진동	마채숙		02/03 황보연
협 조

새로운 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링 및 시행효과 예측분석 용역 시행계획

2020. 1

도 시 교 통 실

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

새로운 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링 및 시행효과 예측분석 용역 시행계획

새로운 광화문광장 조성에 대해 타당성 평가를 통해 시행효과를 예측하고, 연차별 교통 모니터링을 위한 용역 발주계획을 수립하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

○ 새로운 광화문광장 조성으로 시민 편익 및 공익 증대 등 사업의 타당성 여부를 확인하기 위한 교통 등 전반적인 시행효과 분석·평가하고

○ 광화문 광장사업의 전·중·후의 교통 및 사회·경제·문화 등 정량적 지표에 대한 조사·분석, 모니터링을 통해 예상되는 문제점 등 시민불편 최소화 방안 마련

○ 사업 효과를 최적화 시킬 수 있는 광화문 광장과 주변지역의 교통개선 방안을 마련하고 이 사업으로 교통 분야 등에 대한 정책적 시사점 도출

□ 추진경위

○ ’19.3.11.	광화문광장 교통대책 업무이관(도시재생실→도시교통실)

○ ’19.8.28.	광화문광장 교통 모니터링 및 시행효과 예측분석 계획 수립

○ ’19.9.19.	새로운 광화문광장 조성관련 기자설명회(시장)

○ ’19.10.~12.	새로운 광화문광장 조성관련 시민 및 지역주민 공론화

○ ’20.1.10   용역 건설기술심의 완료(조건부 채택)

○ ’20.1.19   사전규격공개 완료

Ⅱ		용역개요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링 및 시행효과(Impact Analysis) 예측분석 용역

○ 과업규모 : (직접)광화문광장 사업 시행지, (간접)녹색교통진흥지역

○ 시행목적 : 광화문광장 조성으로 시민 편익 및 공익 증대의 객관적 평가와 조사 분석 및 모니터링을 통한 교통개선대책 마련

○ 과업기간 : 계약일로부터 2022.2.28.(1차 : 2020.12.31.까지)

- 광화문 광장사업 시행 전·중·후의 조사, 분석 및 모니터링으로 사업완료 후까지 추진

○ 용역비용 : 금498,598,911원(금사억구천팔백오십구만팔천구백일십일원)

- **************************************************

□ 사업 추진방법

○ 용역구분 : 기술용역(기술 및 학술분야 포함, 분담비율에 따라 구분)

- **************************************

*****	*****************	************	****
****	*****	*****	****

○ 계약방법 : 경쟁입찰(협상에 의한 계약), 장기계속계약(’20∼’22)

○ 주요 참여자격         ※ 세부적인 입찰 참가자격은 입찰공고문으로 제시

**************************************************************************************

********************************************************

□ 사업 주요내용

□ Impact Analysis를 활용한 광화문광장 조성 시행효과 예측

○ 광화문광장 조성 시행효과 분석을 위한 교통·사회·경제측면 지표 선정

○ 시행효과 지표 관련 빅데이터 DB 마련 및 Impact Analysis 기술 개발

○ Impact Analysis 기술을 활용한 시행효과 예측 및 사업 타당성 분석 등

Impact Analysis 분석 사례 (광주 도시철도 2호선)

□ 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링(시행 중·후) 및 개선대책 수립

○ 광화문광장 조성(개장) 전·중·후 교통상황 및 여건변화 조사·분석

○ 교통현황 모니터링 조사·분석 결과에 따른 교통개선대책 수립

○ 광화문광장 주변 생활도로 보행환경 개선의 교통정온화 방향 수립 등

□ 향후계획

********************************

***********************

***********************

***************************

붙임  1. 과업내용서 및 입찰공고문 각 1부.

2. 사전규격공개 결과 및 설계내역서 각 1부.

3. 제안요청서 1부.