＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	공간정보과장
(경유)
제목	상수도 공간정보 사용기한 연장 요청

1. 공간정보과-697(2020.1.20.)호 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행하고 있는 「까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」에 필요한 상수도 공간정보의 사용기한을 아래와 같이 연장요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

아  래  -

▢ 상수도 공간정보 사용기한 연장 요청

○ 사    유 : 배수지 건설 예정부지 토지소유자와의 협의가 늦어져, 지반조사 성과품 납품 지연 발생 및 실시설계 등 향후 일정의 순차적 지연에 따른 용역수행 절대기간 부족

○ 용역 현황

- 용 역 명 : 까치산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

- 사업개요 : 배수지건설(V=5,000㎥) 송배수관 부설(D=400~500㎜, L=2.9km)

- 용역기간

· (당초) ’19.5.28. ~ ’20.1.22. ⇒ (변경) ’19.5.28. ~ ’20.7.15.

- 용역사 : ㈜삼안, ㈜유신

○ 요청사항

- 상수도 공간정보 자료 사용기한 변경

· (당초) ’19.6.19. ~ ’20.1.22. ⇒ (변경) ’19.6.19. ~ ’20.7.31.  끝.

	계획설계과장
★주무관	정호정		계획설계과장	02/06 송헌영
협조자	주무관	조규환
시행	계획설계과-1324	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개