투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(신월IC 램프개량공사 조속 시행)

1.업무지시현장 : 서울제물포터널 민간투자사업(1공구) 건설공사 서울터널(주)

2.작 성 일 자 : 2020-02-05 18:02:14

3.지 시 내 용

가. 도시기반시설본부-19-12747(2019.11.05.)호와 관련입니다.

나. 귀사에서 시행하고 있는 서울제물포터널 민간투자사업(1공구) 건설공사의 공사추진이 2020.2월 현재 대비 4.6%가 미달된 상태로 공정 만회를 위한 특단의 조치가 필요함을 알려드리니 공정 만회계획을 수립하여 주시기 바라며,

다. 신월IC 램프(인천방향) 개량공사는 「국회대로지하차도 및 상부공원화(1단계 건설공사)」 와 연계추진이 필요한 구간으로 조기 착공을 요청하니 관련기관 협의내용에 의거 개량공사를 조속히 시행하여 관련공사에 지장이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

1) 요청내용 : 신월IC 개량공사 조속 시행

2) 요청사유 : 국회대로(1단계) 시점부 U-Type 단독구간(L=140m) 시공에 따른 상시 8차로 확보를 위하여 신월IC 개량공사 선행 요함(교통처리계획 심의 시 조건).  끝.

주무관							홍민철			방재시설과장					김태중					방재시설부장					02/06 박홍봉
협조자
시행			방재시설부-1665									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화								/전송								/													/	대시민공개