문서번호	누수방지과-1610
결재일자	2020.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
김영혁	이태형	02/07 신용철

2020년 소블록 배급수관망 개선사업 추진 계획
2020년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

상수도사업본부

시설안전부

2020년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획을 보고 드림.

사  업  개  요

1

▢ 관련근거 : 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 변경【본부장 방침(‘16. 8. 23.)】

▢ 사업기간 : 2014년~2023년

▢ 사 업 비 : 33,868백만원

▢ 정비대상 : 940개소

▢ 사업목적

○ 단일배관 이중화로 무단수 급수체계 구축

○ 단절 구간을 순환관망으로 형성하여 깨끗한 아리수 공급

《 단일배관 이중화 》

《 단절관 순환관망 》

	➡

▢ 실적 및 추진계획

(단위 :백만원/개소/㎞)

구 분	총 계	추진실적			추진계획
		소 계	’14년~’18년	‘19년	소 계	’20년	’21년이후
사업비	******	******	******	*****	******	*****	******
대 상	940	645	506	139	295	75	220
연 장	44.3	20.2	16.2	4.0	24.1	4.0	20.1

2019년 추진실적

2

▢ 정비실적 : 139개소(4.0㎞,100%),   ********(예산집행율 90.2%)

○ 정비목표 : 139개소(3.5㎞),   **********

▢ 사업소별 추진 실적

(단위 : 건)

**	*	**	**	**	**	**	**	**	**
*****	***	**	**	**	**	**	**	*	*
*****	***	**	**	**	**	**	**	**	*
***	**	*	*	*	*	*	*	*	*
******	*	*	*	*	*	*	*	*	*
******	***	**	**	**	**	**	***	***	***

○ 미정비(14개소) : 2020년 예산 범위내에서 사업 추진

○ 사업추진 변경(8개소) : 굴착통제 등 특정 사유로 당해 년도 추진 불가

- 신규 또는 기존 대상으로 변경하여 중장기 계획을 변경 수립

※ 변경된 사업계획은 본부(누수방지과)에 보고

2020년 추진계획

3

○ 소블록 배급수관망 개선 : ***********************

- 단일배관 이중화 :    ***********************

- 단절관 순환관망 :   ***********************

○ 사업소별 추진계획

******		*	**	**	**	**	**	**	**	**
*	*** ****	*********	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	******
	*****	**	**	*	**	**	*	**	*	*
	*****	*****	***	***	***	***	***	***	***	**
** ** ***	*** ****	*******	*	******	*	******	*	*******	*	*
	*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*****	***	*	**	*	***	*	***	*	*
********	*** ****	*********	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	******
	*****	**	**	*	**	**	*	*	*	*
	*****	*****	***	***	***	***	***	***	***	**

▢ 추진방법

○ 사업소별 세부 추진계획 수립 후 정비(연간단가계약 또는 단위사업 등)

○ 3월 초 착공하여 10월 말까지 정비완료를 목표로 추진

향  후  계  획

4

▢ 사업소별 소요예산 배정 : 2월(예정)

▢ 사업 추진계획 수립

○ 추진계획 수립 및 공사 발주(수도사업소 총괄부서, 담당부서)

○ 매월 10일 추진실적 보고 (수도사업소 ⟹ 본부 누수방지과)

붙 임 : 1. 2019년 사업 추진실적 1부.

2. 2020년 사업 추진대상 1부. 끝.