문서번호	정수과-372
결재일자	2020.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		이순재	02/10 신동호
협 조
	주무관			박동식

2020년 연구과제 추진계획 보고

강북아리수정수센터

2020년 연구과제 추진계획 보고

방류수 수질기준에 대응하기 위해 수처리제인 과망간산나트륨의 현장 도입 타당성을 검토하는 연구과제를 추진하고자 함

연구개요

❍ 과제명: 배출수처리공정 용해성망간 제어방안 연구

❍ 기  간: 2020. 1 ~ 12월

❍ 주요 추진내용

- 수질인자(용해성망간 농도 등) 변화에 따른 과망간산나트륨 주입률 결정 랩실험

- 현장적용성 확인을 위한 과망간산나트륨 주입 현장실험

연구배경

❍ 과망간산나트륨 수처리제 지정(2017. 6. 15)

- 댐, 저수지수를 원수로 사용하는 정수장의 수돗물 망간제거효과 보고

- 산화작용(용해성→입자성 망간) 후 응집·침전을 통해 제거

망간제거 이론식 : 3Mn2+ + 2NaMnO4 + 2H2O → 5MnO2(s)↓ + 2Na+ + 4H+

❍ 배출수처리시설 과망간산나트륨 주입시설 설치운영: 덕소정수장(’19. 8월)

- 방류수 대상 과망간산나트륨 주입으로 약 30% 용해성망간 제거

❍ 과망간산나트륨 주입 기초실험 수행(’19. 12월)

- 배슬러지지수, 방류수 대상 기초실험 결과, 배슬러지지수에 대해 용해성망간 제거효과 일부 확인

- 현장도입 타당성(주입률, 현장적용 효과) 검토 필요

세부 추진내용

○ 수질인자(용해성망간, 유기물, 수온)별 주입률 결정실험

- 실험일정/방법: 2020. 2~4월/쟈테스트

- 용해성망간 유입농도별 과망간산나트륨 주입률 결정

- 산화성물질(유기물, 철 등) 및 수온에 의한 반응성 변화 확인

○ 과망간산나트륨 주입설비 현장설치

- 설치시기/위치: 2020. 3월중/배슬러지지 부근(담당자 협조 결정)

- 기존 보유설비(저장조(2m3), 정량펌프)와 실험재료(과망간산나트륨 40%, 이송배관 등)를 구매하여 간이 주입시설 설치

- 과망간산나트륨 주입률: 1~20ppm

○ 과망간산나트륨 주입 현장실험

- 실험일정/방법: 2020. 4~11월/현장 주입실험

- 과망간나트륨 주입에 따른 공정별 수질변화 모니터링 실시

- 용해성망간 농도 상승기(고수온, 청소 등) 주입효과 집중 평가

- 경제성분석: 단위 용해성망간 제거를 위한 시설비+운영비 분석

향후계획

❍ 연구과제 추진 중간보고: 2020. 7월

- 주입효과 1차분석 진행, 차년도 예산 반영 검토

❍ 2020년 연구과제 추진 최종보고서 작성: 2020. 12월.   끝.