문서번호	급수운영과-2671
보존기간	년
결재일자	2020.2.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최선보	문병희	代문병희	02/10 정진일
협 조
	시설운영팀장		김남구
	시설안전팀장		박종덕

2020년도

장기사용 배급수관 정비사업 추진계획

2020. 2.

강서수도사업소

2020년도 장기사용 배급수관 정비사업 추진계획

2세대 녹이 없는 수도관 중 관내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 위험이 높은 배급수관을 정비하여 깨끗하고 건강한 아리수를 공급하고자 함.

□ 근 거

○ 누수방지과-407(’20.1.9.) 2020년 장기사용 배급수관 정비계획

□ 추진개요

○ 정비목표 : 2㎞

○ 총사업비 : 2,001백만원

○ 사업기간 : 2020. 1. 1 ~ 12. 31.

○ 정비대상 : 덕타일주철관(시멘트라이닝, 무라이닝)

- 수질 및 누수사고 개연성이 높은 ’84~’85년 부설된 덕타일주철관

- 2세대 상수도관 중 급격한 노후화로 도장재가 탈락된 취약 상수도관

○ 정비 우선순위

- 1순위 : 녹물 및 이물질 출수 등 민원발생 구간

- 2순위 : 누수 다발구간

- 3순위 : 서울형 도시 재생 활성화 지역

□ ’19년 추진실적

○ 목표 : 12.0㎞ / 실적 : 9.2㎞(78%)

(단위 : ㎞)

구 분	계	단위공사 (80~300㎜)	연간단가 (80~300㎜)	비고
계	9.2	4.7	4.5
급수운영과	7.7	4.7	3.0
시설관리과	1.5		1.5

※ ’19년 미정비한 잔여구간(2.8㎞) 단위사업으로 추가발주하여 ’20년 정비예정

□ ’20년 추진 계획

○ 정비목표 : 2,000m                         (단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업			연간단가
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	2,000	2,001	2	1,808	1,586	192	415
급수운영과	192	415				192	415
시설관리과	1,808	1,586	2	1,808	1,586

□ 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	담 당
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 2건		80～300	1,808	1,586
1	신월동 89-1~ 화곡동 368-3외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사	80~300	968	888	홍성철
2	화곡동 1062번지 일대외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사	80~150	840	698	오장록

□ 추진일정

도면심사	⇒	일위대가	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약및착공	⇒	준 공
’20.1월(완료) (누수방지과)		’20. 2월(완료) (안전총괄과)		2020.2월말 (계약심사과)		2020. 3. (재무과)		2020. 3~4.		2020. 11.

□ 중점 추진사항

○ 철저한 현장조사 및 선제적 기술검토 실시

- 교통현황 및 지하매설물에 대해 세밀한 현장조사 실시

- 설계단계 부터 공법변경 등 예측 불가능한 상황에 대비한 기술검토  실시(필요시 본청 및 본부 기술검토 협의)

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 보완 최소화 및 심사   지연 방지

- 도로굴착 승인, 교통소통대책  및 유기관기관 협의 등 병행 추진

○ 공사 예정지역의 잠재적 민원 사전 예측 및 해결방안 마련

- 녹물출수, 야간공사 예정지역에 대해 공사 초기단계 부터 안내문 부착,   홈페이지 공지 등을 통한 충분한 홍보 실시

Ⅲ		행 정 사 항

○ 추진실적 보고 : 매월 7일 이내(본부 누수방지과)

○ 도로굴착사업계획조정 심의 : 2020년 2월

○ 도로굴착승인 신청 : 2020년 2월말

붙임  1. 본부 방침서 1부.

2. 배급수관 정비공사 단위사업 카드 각 1부.  끝.