문서번호	행정지원과-2926
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
방만천	강정환	박달경	02/11 박영헌
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

집행잔액 검토 보고

2020. 2. 10.

서부수도사업소

【행정지원과】

서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

집행잔액 검토 보고

우리사업소에서 시행한「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련 집행잔액에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

❍ 도 급 자: ***************

❍ 공사기간: 2019. 10.14.~12.20.(1회 준공기한연기)

- 당초계약기간: 2019. 10.14.~12.02.

❍ 준공검사일자: 2020.02.04.

❍ 계약금액: 금165,340,690원

❍ 준공정산(합)금액: 금106,275,270원

□ 추진현황

❍ 계약현황

구 분	일자	준공기한	사유	금액변경	상세사유
계약일자	2019.10.11.		최초계약	-
착공일자	2019.10.14.	2019.12.02.	착공일자	-
변경계약일자	2019.11.29.	2019.12.20.	준공기한연기	-	· 공정추가, 시공방법변경, 우천일수 다수 등
공사연장요청	2019.12.18.	-	불가회신(12.19.)		· 사유 불충분
공사연장요청	2020.01.02.	-	불가회신(01.03.)		· 기 통보 사항
준공계제출	2020.01.30.	준공지연
준공(최종)검사 일자	2020.02.04.	지체상금부과

❍ 설계변경 미시행 사유

- 준공기한내 설계변경을 위한 자료제출을 시공사에 수차례 공문발송(7회)하였으나, 제출하지 않아 설계변경을 하지 못하고 본 사업은 준공지연으로 사고이월됨(지체상금부과).

❍ 준공정산지연

- 준공지연 및 공사물량 변경 등 설계자료 검토를 위해 시공사에 자료제출(공문2회 발송) 요청하였으나 지연제출.

□ 정산현황

❍ 정산금액

(단위:원)

계약금액	정산금액				집행잔액
	1차	2차(최종)	지체상금	총 지급금액
***********	**********	**********	*********	***********	**********

❍ 준공기한 지체일수: 46일

*******************************************************************************

붙임  1. 정산보고(최종) 1부.

2. 정산시행(최종) 1부.

3. 준공기한내 자료제출요구 공문 1부.

4. 준공기한이후 자료제출요구 공문 1부.