투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(문화비축기지 에코쉘터 설치 공사)

1. 문화비축기지관리사무소-156(2020. 2. 4.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건    명 : 문화비추기지 에코쉘터 설치 공사-서부

나. 계 약 자 : ㈜에스앤비건설 대표 박희문

다. 계약금액 : 금154,293,630원(금일억오천사백이십구만삼천육백삼십원)

라. 공사기간 : 2019. 12. 23.~ 2020. 2. 12.

마. 변경내용 : 준공기한 변경

○ 당초 : 2020. 2. 12. → 변경 : 2020. 4. 14.

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		재무팀장	김극남		공원운영과장	최석환		서부공원녹지사업소장	02/07 남길순
협조자
시행	공원운영과-1626	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)