문서번호	정보통신보안담당관-3513
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	스마트CCTV팀장	정보통신보안담당관
김남훈	변순권	02/11 공병엽

시 소속기관 CCTV 통합구축 사업 변경계약(기한연장) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
자체방침	***********	구매계약 일정 변경에 대한 검토	완료	*********

정보통신보안담당관

(스마트CCTV팀)

시 소속기관 CCTV 통합구축 사업 변경계약(기한연장) 계획

’19년도 시 소속기관 CCTV통합구축 사업 관련 녹지사업소 관할 공원사무소와 서울시 간 통신선로 연계를 위해 통신회선 사업자 전용회선 임대 협의·검토로 인한 납품기한을 변경하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : ’19년도 시 소속기관 CCTV통합구축 사업

○ 사업기간 : ’19. 12.18. ~ ’20.2.15.

○ 계약금액 : **********

○ 계 약 자 : ***********

○ 구축내역 : 가상화서버, 레이드저장장치 및 통신소프트웨어 등 납품 및 시 사업소 CCTV 통합연계 구축

□ 변경내역 : 납품기한 변경(’20.2.15. → ’20. 3. 7.)

구분	당 초	변 경	비 고
납품기한 변경	’19.12.18~’20.2.15	’19.12.18~’20.3. 7	21일 연장

※계약금액 변동 없음

□ 변경사유

○ 서울시 자가망 구축이 안된 녹지사업소 관할 공원사무소(7개소) CCTV연계를 위한 통신회선 사업자 전용회선 임대상품 협의·검토 및 임대전용회선 구축기간 소요에 따른 납품 기한연장

□ 향후계획

○ 재무과 계약변경 요청 : ’20.2.11.(화)

○ 납품·구축 및 검수 : ’20.2.17.(월) ~ ’20.3.7.(토).  끝.