문서번호	도시계획과-1871
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	종합계획팀장	도시계획과장
김래연	심재욱	02/11 최진석

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월간보고(2020.1월)

2020. 2.

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월간보고(2020.1월)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 UPIS 및 도시계획포털 유지관리 용역

○ 용역기간 : 2020. 01 .01 ~ 2020. 12. 31

○ 용 역 비 : 174,000 천원

○ 용 역 사 : 주식회사 텔루스

○ 과업대상

구 분	시스템명	세부내용
응용 프로그램	도시계획 정보시스템	○ 도시계획입안·결정시스템 ○ 도시계획 인트라넷 ○ 3D 의사결정지원시스템 ○ 과밀부담금관리시스템
	도시계획포털	○ 도시계획포털(웹사이트)
소프트웨어	상용S/W	○ 웹서버 1식 (JEUS & WebToB) ○ 지도엔진 1식 (ArcGIS Server)

○ 과업내용

- 입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

- UPIS DB현행화(도시관리계획 입안·결정도면 편집 및 탑재) 및 유지보수

- 도시계획정보 베이스맵 DB갱신(연속지적도, 건물, 수치지형도 등)

- 시스템 운영 및 유지관리

- 상용 소스트웨어 유지관리(웹서버, GIS엔진)

- UPIS 입력대상 고시자료 모니터링 업무지원

- 헬프데스크 운영 및 지원

□ 주요추진내용

입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

○ 추진개요 : KRAS기준 주제도 누락 및 중복, 선형 불일치 등 오류사항 보완

○ 추진기간 : 2020.01 ~ 2020.05

○ 추진대상 : 용도지역(주거&용도지구

○ 추진절차

자료수급		CODE값 분류		CODE별 중첩 확인		누락 및 선형 상이지역 추출		KRAS선형 >UPIS반영		고도화시스템 DB반영 (변환)
‘20.01		‘20.1.~2.		‘20.2.		‘20.2.		‘20.2.~4.		‘20.4.~5.

○ 추진내용

- 관련자료 수집 완료 : 용도지역(17개 CODE), 용도지구(20개 CODE)

- 자료검토를 위한 용도지역/용도지구 CODE값 분류(진행 중(45%))

데이터 현행화

구 분

접수 및 처리내용

처리결과

향후계획

자료

○ 연속지적도 갱신 (월별)

○ 건물,타법,KRAS 용도지역,기타지역지구 갱신

(분기별)

정상처리

○ 연속지적도 갱신 (월별)

고시도면

○ 요청대상

고시목록 관리기준일	요청건수	관리대상 (고시 / 조서)	비관리
‘19.10.01~’20.09.30	113건	109건 / 286건	4건

○ 처리현황

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	미처리
‘19.10.01~’20.09.30	109건	78건	13건	18건

○ 2020.1월 현행화 실적

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	비관리
‘20.01.01~’20.01.31	44건	32건	12건	0건

※ 19년도 1월 실적(27건) 대비 163%

업무지원

구 분	접수 및 처리내용	처리결과
운영지원	[ 입안결정시스템 ] ○ 도시계획입안결정 시스템 사용 주제도 레이어 현황 제공 [ 도시계획포털 ] ○ 고시알림서비스 포털공유 모니터링 조회건수 반영처리 ○ 포털사이트 도시계획소계 중 경관계획 파일 다운로드 추가 반영 - 경관심의도서 작성방법 설명서(개발사업) ○ 포털사이트 알림마당-도시건축공동위원회 명단 파일 교체 ○ 포털사이트 주요 연락처 및 부서정보 변경 - 종합계획팀 내 UPIS시스템 유지보수 내용 추가 [ 과밀부담금시스템 ] ○ 과밀부담금 고시서 납부계좌변호 변경	6건
사용자지원	○ UPIS 프로그램 설치 지원, 오류처리, 사용법 문의 등	38건
기타지원	○ 2020년 유지관리 과업설명 보고 - 일시 : 20.01.20(월) 14:00 ~ 16:00 - 대상 : 종합계획팀장 외 팀원 - 내용 : 19년 및 20년 추진현황 및 향후계획 등 ○ 정보통신과 서버점검에 따른 서버점검 대응 매뉴얼 제공 - 2월 정보통신과 전원차단 시 재가동에 대한 응대	2건

정기점검

○ 서버 점검

서버명	성능	네느워크 상태	디스크 상태	소프트 웨어	에러
Web Application Server	양호	양호	양호	정상	없음
Web Server 1	양호	양호	양호	정상	없음
Web Server 2	양호	양호	양호	정상	없음

○ 어플리케이션 점검

서버명	대상기능	점검결과		비 고
		정상	비정상
도시계획정보시스템	18개	18개	-
3D의사결정지원시스템	9개	9개	-
도시계획인트라넷	8개	8개	-
도시계획포털	15개	15개	-

시스템 장애처리

○ 장애처리 요청 내역

합계	응용프로그램	웹서버	DB	서버	기타
-	-	-	-	-	-

○ 장애처리 요청 내역 상세

구분	일 시	장애원인&내용	조치사항	조치결과
-	-	-	-	-

기타사항

○ 유지보수인력 근무상황

성 명	근무내용	근무대상	근무일	비근무일	비고
박 용 남	시스템 운영 지원	20일	20일	-
김 선 화	데이터 현행화	20일	20일	-

□ 차월 추진계획(2월)

시스템명

2월 추진내용

UPIS

(입안결정)

○ UPIS<>KRAS간 용도지역/용도지구 정합성 검토 및 보완

자료수급		CODE값 분류		CODE별 중첩 확인		누락 및 선형 상이지역 추출		KRAS선형 >UPIS반영		고도화시스템 DB반영 (변환)

- CODE별 중첩 확인

- 누락 및 선형 상이지역 추출 > KRAS 선형 반영

3D

의사결정

지원시스템

○ 3D Virtual Seoul 로 자료이관방식에 대한 업무협의 (공간정보과)

붙임  1. DB현행화 내역서 1부.

2. 시스템 운영내역 및 작업내역서 각 1부.

3. 헬프데스크 처리내역 1부.

4. 시스템 정기점검보고서 1부.

5. 유지보수요원 출근부 1부.  끝.