문서번호	시설과-1164
결재일자	2020.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
김학석	조대복		양희상		오성문		02/12 송천헌
협 조
	동물원장					어경연
	전략기획실장					전진수
	총무과장					유연호

- 대기 오염물질 배출 저감을 위한 -

2020년도 노후 냉․난방설비 개선 계획

2020. 2.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 대기 오염물질 배출 저감을 위한 -

2020년도 노후 냉·난방설비 개선계획

온실가스와 대기 오염물질 배출저감을 위한 2020년도 노후 냉·난방설비 개선계획을 수립 시행하여 온실가스 저감을 통한 에너지 절약과 강화된 대기환경보존법에 적합한 시설요건을 확립하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 온실가스 저감을 위한 서울대공원 시설 개선계획[시설과-1131(`19.02.21)]

□ 온실가스와 대기 오염물질 배출 저감을 위한 노후 냉·난방설비 개선 계획[시설과-4904(`19.07.12)]

Ⅱ		시설현황

□  난방(보일러)시설 : 29개동 37대

□  공기조화기 :11개동 21대

▶ 세부내용 (붙임1, 2) 참조

Ⅲ		추진방향

□ 서울대공원 대기배출시설 오염물질 측정 및 변경신고 실시

□ 동물사 내 노후 보일러 교체

○ 곤충관 노후 보일러(40만㎉/hr, 2002년 설치) 교체

▶ 에너지효율을 고려 기존 공조기와 연동된 자동제어설비 설치

▶ 곤충관 1층 증식실 및 사무실 개별 냉·난방설비 설치 추진

□ 꼬마동물사 외 3개소 법적기준 미충족 시설 개선

○ 노후도와 별도로 법적 기준에 미충족되는 소형 보일러(5만㎉/hr미만) 우선 개선

▶ 꼬마동물사, 유리온실, 종합관리사무소, 야행관 등 4개소

▶ 에너지효율을 고려한 자동제어설비 설치

□  교체 보일러 설비는 친환경 인증된 콘덴싱 형 Cascade system 적용

▶ 기존 설비와 호완되게 일부 시설 변경

Ⅳ		시행계획

□ 서울대공원 대기배출시설 오염물질 측정 시행

○ 대상시설 : 동양관외 6개소 8대(2015년 이후 설치 보일러)

▶ 대기오염물질 전문 측정대상 업체에 의뢰 측정 시행

○ 소요예산 : 3백만원

○ 계약방법 : 측정업체에 수의계약

○ 측정기간 : 2020.02.~03.20(보일러 가동기간 중)

○ 예산과목

공원이용 시민 만족도향상, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

□ 서울대공원 대기배출시설 변경 신고

○ 대상시설 : 유인원관 외 4개소

▶ 대기오염물질 전문 측정대상 업체에 변경신고 의뢰

○ 소요예산 : 1백만원

○ 예산과목

공원이용 시민 만족도향상, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

□ 개선 대기배출 시설 실시 설계 용역시행

○ 용역내용

- 보일러 교체시 각 시설별 난방부하 계산을 통한 보일러 용량 산정(검토)

- 친환경 Cascade system과 기존 난방설비(순환펌프, 방열기 등)와 상호 보완 및 호완되게 설계 적용

- 에너지절약을 위한 효율적 계장제어시스템 적용

○ 소요예산 : 15백만원

○ 계약방법 : 전문엔지니어 업체와 수의계약

○ 용역기간 : 2020.03~04.30(60일간)

○ 예산과목

공원이용 시민 만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화,  공원시설물유지보수 및 정비, 시설비

□ 공사시행

○ 공 사 명 : 서울대공원 2020년도 노후 냉·난방 설비 개선 공사

○ 공사기간 : 2020.05~07.31(3개월간)

▶ 난방 종료후 공사 시행

□ 소요예산 : 240백만원

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

□ 입찰참가자격

○ 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 면허를 등록한 업체로 입찰공고일 전일부터 주된 영업소가 서울시 및 경기도에 소재한 업체

□ 예산과목

공원이용 시민 만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 시설비

Ⅴ		행정사항

□ 대기배출시설 측정 및 변경신고 : 2월 중 완료

□ 실시설계 용역 계약의뢰 : 3월 중

□ 계약 및 용역 시행 : 계약일로부터 60일간(4월말 완료)

□ 공사시행 : 5월 20일 이후 부터 ~7월까지 완료

□ 정산 및 준공처리 : 7월 말

붙임 : 1. 서울대공원 보일러 현황 1부.

2. 서울대공원 공조기 현황 1부.  끝.