“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	시 소속기관 CCTV통합연계 구축 사업 납품 기한연장 요청

1. 정보통신보안담당관-3513(2020.2.11.)호와 관련입니다.

2. 「＇19년 시 소속기관 CCTV통합연계 구축 사업」과 관련하여 아래와 같이 납품기한의      연장을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 :＇19년 시 소속기관 CCTV통합연계 구축

나. 계약업체 : 뉴코리아전자통신(주)

다. 계약기간 : 2020.2.15.

라. 변경내용 : 납품 기한연장(당초 2020.2.15. → 변경 2020.3.7.)

마. 변경사유 : 서울시 자가망 구축이 안된 녹지사업소 관할 공원사무소(7개소) CCTV                     연계를 위한 통신회선 사업자 전용회선 임대상품 협의·검토 및 임대                     전용회선 구축기간 소요에 따른 납품 기한연장

붙임 1. 계약변경 방침       1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서            1부.  끝.

	정보통신보안담당관
주무관	김남훈		스마트CCTV팀장	변순권		정보통신보안담당관	02/12 공병엽
협조자	계약1팀장	조현
시행	정보통신보안담당관-3663	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)