문서번호	기전과-1313
결재일자	2020.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		02/12 代김흥식
협조

『구로동 오피스텔 신축』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

강서도로사업소

(기전과)

『구로동 오피스텔 신축』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 승인 검토 보고임

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-17547(2019.07.10.)호

세영(토)-2020-0201(2020.02.  .)호

대영전기감 GE20C-02-05(2020.02.05.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 구로동 512-2번지 오피스텔 신축공사 중 교통안전시설물 공사

원 인 자 : ㈜세영엔지니어링

위     치 : 구로구 구로동 512-2 주변

공사개요 : 교통안전시설 신설(경보) 및 이설(안전표지), 지주통합(신호등＋가로등)

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜트래픽스	대영유비텍㈜	㈜비엔에스	지주 신설 2본 신호등(경보) 신설 2조

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2019.11.12. ~ 2019.12.31.

준공검사 : 2020.01.09.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2020년 01월 09일 14시

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	대영유비텍㈜	*****
입 회 자	대영유비텍㈜	*****
″	서울특별시 교통운영과
″	구로구청 교통행정과
	구로구청 도로과
	구로구청 교통행정과
″	서울지방경찰청 교통관리과
″	구로경찰서 교통과
시 공 사	㈜비엔에스	*****
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과 및 조치내용

구 분	점검결과	수량	조치결과
지주	통합폴 미설치	1	통합폴 설치
	불법광고물부착방지시트 미설치	1	부착방지시트 설치
맨홀	보도블럭 간 단차 발생	1	평탄화 완료

Ⅳ		조 치 의 견

준공 지연 사유

- 원인자 시설물 인수인계서 제출 지연

※ 인수인계 기간 : 준공검사 후 30일(원인자 준수사항)

상기 검사결과 조치내용과 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 승인      하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보 및 시설물 인수인계.

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공검사조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공검사 지적사항 조치 결과보고 1부.

4. 준공내역서 및 준공도면 1부.  끝.