설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

□ 공사명: 2019년 서초구 관내 상수도 공사(장기계속단가-3차,최종)

신청 부서명	강남수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설주사보 최지영
제출 년월일	2020. 2. 13.

□ 심의 위원회 의견

○ 심의일시: 2020. 2. 13.(목) 11:00~

○ 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이

의견 제시함

○ 심의의견사항 반영: 아래 “의견”란에 검토사항 작성함

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

정재현

02/13

정재현

적정함

위    원

시설운영팀장

전동근

전동근

적정함

위    원

급수운영팀장

이승우

이승우

적정함

위    원

급수관리팀장

김진성

김진성

적정함

위    원

주무관

김재영

김재영

적정함

위    원

주무관

박홍

박홍

적정함

담    당

주무관

최지영

최지영

설계변경 사유서

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 2019년 서초구 관내 상수도공사(장기계속단가-3차,최종)

○ 공사개요: 관부설 D=15~300㎜

당초)L=972m  변경)L=967m (감5m)

○ 공사기간: 2019. 5. 22. ~ 2020. 6. 30.

****************************************

************************

*********************

□ 설계변경 사유 및 주요 내용

○ 관련규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법시행령 제74조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4.)제13장 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

○ 공사현장 실정에 따른 변경요인

- 계약물량증가: 아스팔트 포장절단 200㎜이하 외 105종

- 계약물량감소: 콘크리트 깨기 소형브레이커 외 204종

- 신공정발생: 주철직관 부설공 300㎜ 외 9종

- 사급자재 물량 변경: 주름마디 스테인레스강관(D=13㎜) 외 86종

□ 설계변경 금액

(단위:원)

***	*******	*******	증감	비고
*****	***********	***********	*************	*******
****	***********	***********	*************
*****	**********	**********	*************

붙임: 설계변경 내역서 등 각 1부.  끝.