문서번호	건축부-2615
결재일자	2020.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김성권		유현수	02/13 임인구
협조	주무관		허성민
	주무관		이준범

『시립동대문 실버케어센터 건립공사』

철거공사 추가 시행에 따른 실정보고

2020. 02.

도시기반시설본부

건  축  부

『시립동대문 실버케어센터 건립공사』

철거공사 추가 시행에 따른 실정보고

****************************************************************************************************

********************************************

※ 관련근거 : 동대문실버케어-107호(20.02.10) 철거공사 관련 실정보고 검토

건축부-21598호(19.12.11) 설계자 설계도서 검토의견서 송부

1		공사개요

○ 위     치 : 동대문구 답십리동 553,554번지

○ 규모/용도 : 지하1층지상4층, 연면적 2,884㎡/노유자시설

○ 구     조 : 철근콘크리트구조

○ 공사기간 : ‘19.08.01~’21.03.31

○ 시 공 자 : ㈜서유종합건설외 1개사

○ 감 리 자 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소외 1개사

2		보고(검토)내용

○ 구조물 철거

- 철도변 블럭담장 및 옹벽 철거 미 반영    : 171㎥

- 밥퍼 조형물 설치 지점 데크 철거 미반영 : 69.3㎥

- 작업구간내 무허가 건물 철거 미반영         : 115.7㎥

○ 아스팔트 포장깨기

- 기존 주차장 바닥 포장깨기 비반영 : 21㎥

○ 매립 폐기물 처리

- 공사구간 지반조사결과 매립 폐기물 확인으로, 운반 및 폐기물처리

수량 증가 : 2,613㎥

[설계 미반영 현황]

[담 장]	[옹 벽]	[데 크]	[주차장 바닥]

3		설계사 및 감리단 의견

******************************************************

**********************************************************************************************************************

4		변경현황 및 공사비

○ 주요 변경사항

공 종	내 용	수량(㎥)		증·감	비고
		당초	변경
구조물 철거	담장 및 옹벽	6	177	171
	데 크	0	69.3	69.3
	무허가 건 물	0	115.7	115.7
포 장 깨 기	주차장 바 닥	61	82	21
폐기물 처리	매 립 폐기물	633	3,246	2,613

○ 공사비 산출현황

공 종	규격	금액(원)		증·감	비고
		당초	변경
무근콘크리트깨기	기계,t=30㎝미만	118,536	3,496,812	3,378,276
데 크 철 거	인력, 목재	0	3,247,051	3,247,051
무허가건물 철거	인력	0	5,421,123	5,421,123
아스팔트포장깨기	기계,t=30㎝미만	545,645	733,490	187,845
폐 기 물 상 차	백호 0.7㎥	2,097,762	10,757,244	8,659,482
소 계		17,106,851	38,000,628	20,893,777

※ 단순 수량 증감으로 기존 및 신규 비목은 낙찰율(86.0129%) 적용

5		검토결과

***********************************************************************************************************

- 설계사에 설계도서에 대한 검토의견서에 조사가 어려워 일부 공종이 누락되었음을 확인 받았음.

6		검토자 의견

******************************************************************************************

*****************************************************************************

따로붙임 : 철거공사 실정보고 1부.  끝.