“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 계약기간 연장 의뢰 (단독주택 및 중소형건물 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업)

1. 에너지시민협력과-1202호(2020.2.13.)호와 관련입니다.

2. 국내 코로나바이러스 확산으로 시민들의 안전을 위해「단독주택 및 중소형건물 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업」일부가 중지됨에 따라 아래와 같이 계약기간을 연장하여 향후 사업을 마무리하고자 하오니 계약기간 연장을 요청드립니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 단독주택 및 중소형건물 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업

- 용역기관 : ㈜건축사사무소 알이도시건축

- 용역금액 : 금118,800,000원정(금일억일천팔백팔십만 원)

- 용역기간 : 2019.12.9.~2020.2.28

나. 변경내용

- 용역기간 연장(45일 연장, 금액 변경 없음)

구 분	변 경 전	변 경 후
용역기간	2019.12.9.~2020.2.28	2019.12.9.~2020.4.14.
용역금액	금118,800,000원	금118,800,000원

- 변경사유 : 코로나바이러스 확산으로 사업일시 중단됨에 따라 계약기간 연장

- 연기사유 귀책소재 : 서울시와 용역수행자 합의에 의함

- 지체상금 부과여부 : 미부여

붙  임  1. 용역계약기간 변경계획 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	에너지시민협력과장
주무관	이수진		에너지지원팀장	박월진		에너지시민협력과장	02/13 김연지
협조자
시행	에너지시민협력과-1204	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3588	/전송	02-2133-1021	/	idips4010@seoul.go.kr	/	부분공개(5)