문서번호	에너지시민협력과-1202
결재일자	2020.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	에너지지원팀장	에너지시민협력과장
이수진	박월진	02/13 김연지

단독주택 및 중소형건물 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업 용역 계약기간 변경계획

2020. 2.

에너지시민협력과

단독주택 및 중소형건물 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업

용역 계약기간 변경계획

국내 코로나바이러스 확산됨에 따라「단독주택 및 중소형건물 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업」용역의 준공기한을 연기하여 변경계약을 체결하고자 함

□ 용역개요

○ 계약건명: 단독주택 및 중소형건물 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업

○ 계약업체:(주)건축사사무소 알이도시건축

○ 계약금액: 금118,800,000원정(금일억일천팔백팔십만 원)

○ 계약기간: 2019.12.9.~2020.2.28.

○ 용역내용: 단독주택 및 중소형건물 에너지데이터 수집 분석 및 데이터 활용한 플랫폼 운영방안 수립

□ 용역계약 변경

○ 계약기간 연장

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약기간	2019.12.9.~2020.2.28.	2019.12.9.~ 2020.4.14	45일 연장
계약금액	118,800,000원	118,800,000원	변동없음

○ 연장사유

- 국내 코로나바이러스 확산에 따라 에너지진단 등 주민 참여활동이 중단됨에 따라 용역수행 완료를 위해 계약기간 연장 필요

○ 연기사유 귀책소재 : 서울시와 용역수행자 합의에 의함

○ 지체상금 부과여부 : 해당없음

□ 향후일정

○ 변경계약 체결 의뢰(에너지시민협력과 → 재무과) : 2020.2.13

○ 변경계약 체결                                : 2020.2월 중

○ 최종보고 및 용역준공                         : 2020.4월 중

붙임  합의각서 1부.  끝.