투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제 목	사업계획변경(기간연장 및 사업비(감리비)확보) 요청 (올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

우리시(본부)에서 시행중인 『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』와 관련하여 연차별 적정예산 미 투입으로 인한 절대공기가 부족한 실정으로, 원활한 사업추진을 위하여 사업계획변경(기간연장 및 감리비 확보)을 요청 드리오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  사업계획변경 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이현국		터널건설과장	최진우		토목부장	02/14 김용제
협조자
시행	토목부-3162	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	leehk1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)