문서번호	설비부-2267
결재일자	2020.2.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비부장	열빛총괄과장
나경운		임정규	02/17 여인웅
협조

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』

공법기자재(3차) 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

〔탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사〕

공법기자재(3차) 납품기한 연기 검토 보고

「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」의 선행공정 지연으로 관급자재(공법 기자재 3차 계약) 납기를 연기하고자 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□ 위    치 : 서울시 강남구 개포로 625일원(탄천물재생센터 내)

□ 공사규모 : 총인처리시설(45만톤/일), 총인가압부상장치 1식, 슬러지농축설비 1식

□ 공사기간 : 2017. 12. 04 〜 2020. 12. 31.

□ 공 사 비 : 11,715백만원(도급 1,837, 관급 9,878)

□ 도 급 사 : ㈜이수에이치앤씨 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

2		계약 현황(공법기자재)

□ 계약 상대자 : 코오롱이엔지니어링(주)

□ 계약 일자 : 2018. 3. 8.

□ 계약 상세 현황

(단위 : 원)

구분	총 차	1차	2차	3차
계약금액	7,493,000,000	149,827,760	5,589,451,040	1,753,721,200
계약일자	2018.3.8	2018.3.8	2018.7.24	2019. 3. 27.
납품기한	‘18.3.8. ∼‘20.2.28.	‘18.3.8. ∼‘19.12.31.	‘18.7.24. ∼‘19.12.31.	19.3.26. ∼‘20.2.28.

3		검토 내용

□ 납품기한 변경(연장) 사유

- 선행 공종 미시공(1·2처리장 기계실 및 건축구조물)으로 인하여 총인처리 공법기자재 설치가 불가하여 납품기한 연장이 필요함

□ 변경 내용

구분	계약번호 [구매관리번호]	계 약 금 액		납 품 기 한		비고
		당초	변경	당초	변경
3차	12192032000 [12182015400]	1,753,721,200원	변경없음	`20.2.28.	`21.4.30.	증)427일

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		건설사업관리기술자 의견

□ 1·2처리장의 건축구조물 완료시점이 2020년 6월말 예정으로 3차분 공법제어반 외 기자재의 설치가 불가하며, 전체 공법기자재 설치와 연결배관 설치 일정 및 수질보증을 확인하기 위한 종합시운전 일정을 감안하여 납부기한 변경(연장)함이 타당하다고 판단 됨.

5		보고자의견

□ 선행 공종(토목, 건축공사)의 완료시점과 수질보증을 확인하기 위한 종합시운전 6개월을 고려할 경우 책임건설사업관리 기술자 검토 의견이 타당하다고 사료되어 계약부서에 관급자재(공법 기자재) 변경계약(납기연장) 요청하고자 함.

붙임  기계설비공사 중 총인공법기자재 납품기한 연장(3차분) 요청 1부.  끝.