문서번호	도시철도설비부-1699
결재일자	2020.2.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
양인석		백성현	02/17 김영수
협조

도시철도 하남선(5호선연장) 2단계

전차선공사(제3차) 시행 계획

2020.02.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

하남선(5호선연장)2단계 전차선공사(3차)시행 계획

도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사(제3차)를 다음과 같이 시행하여 잔여 공정 추진에 만전을 기하고자 함.

사업개요

공 사 명 : 도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사

공사구간 : 하남선 H4~H5정거장

계약금액 : **********************************

공사기간 : ****************************************

시 공 사 : *****************************

감리/설계 : 세종기술(주)/디투엔지니어링

추진현황

`18.07.20. : 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사 착공

`18.11.23. : 총차 변경계약 (준공기한 연기 – 계약금액 변경 없음)

`19.06.12. : 1차 변경계약 (계약금액 변경 없음)

- 사 유 : 효율적 공정관리와 원활한 공사 진행을 위한 차수간 내역 변경

`19.06.30. : 1차 준공

`19.07.01. : *************************

`19.07.31. : ****************************

`19.11.22. : ****************************

`20.02.13. : 2차분 공정률 100%

`20.02.14. : 3차분 계약 검토 보고 및 2차분 준공계 제출(감리단)

차수별 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약 금 액	공 사 기 간	집 행 내 역							잔 액
			계	선 금	기성 및 준공
					소 계	1회	2회	노무비 (대금e)	준 공
총 차	*****	*********** *********	*****		*****	***	***		*****	***
1 차	*****	*********** *********	*****		*****	***	***		*****
2 차	*****	*********** *********	***		***	***	***			***
3 차	***	*********** *********	*		*					***
잔 여	0		0							0

전차선공사 3차 계약내역

공사규모

- 1차분 : 지지금구 706개소, 앙카링 17개소, 지지애자 1,277개소, 알루미늄 T-Bar 3,398m

- 2차분 : 알루미늄 T-Bar 2,696m, Trolley Wire 6,105m, 표지류 설치 86개소

- 3차분 : H5 정·부급전선(정: 476.684m, 부: 201.880m)포설, 표지류 설치 218개소

계약금액 및 공사기간

구분	계약금액(원)	계 약 기 간	비 고
총차	*************	*********************
1차	*************	*********** *********
2차	*************	*********************	*****************
3차	***********	*********************	금회분

3차 조기계약 추진 사유

2단계구간의 적기 개통을 위한 종합시운전 대비 2차 공사물량 조기 시공완료

시공의 연속성 및 시공품질 등을 위하여 3차계약을 조기 추진하여 효율적인 공정관리코자 함

책임감리 검토의견

**********************************************************************************************************************************************************************************.

【관련근거 : 서지 하남선(감) 제20-61호(‘20.02.14)】

조치계획

본 공사는 장기계속공사로써 차수별 계약에 의거 진행함에 제2차 계약건의 공사(공정률 100%) 완료 되었고, 제3차분 전차선공사를 계약하여 원활한 공사추진을 함으로써 개통일정에 차질이 없도록 시행 코자 함.

******************************

*******************************

붙 임 : 2단계 전차선공사 제3차 계약요청 및 감리 검토 보고서 1부.  끝.