문서번호	총무과-5255
결재일자	2020.2.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		김창중	02/17 김혁
협 조	주무관			우석식
	주무관			권순관

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  ( 공업6급 / 임삼택주무관 )

- 실행계획자 :  ( 공업6급 / 임삼택주무관)

( 공업7급 / 권순관주무관)

- 실  행  자 :  ( 공업6급 임삼택, 공업7급 권순관 )

방송환경 개선을 위한

브리핑 룸 방송용 조명 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

행  정  국

(총  무  과)

방송환경 개선을 위한

브리핑 룸 방송용 조명 설치 계획

최신 고화질 TV 발전에 따라 방송카메라의 화질이 중요해지고  있으나, 브리핑 룸의 방송 환경이 열악하여 정책발표자의 TV화질이 저하됨으로 특수조명을 설치하여 방송미디어 환경을 개선코자 함

□ 시민 제안

❍ 제안내용 : 서울시청 브리핑 룸에 조명시설 설치요청

- 서울시 브리핑 룸에 조명환경이 구비되어 있지 않아 방송카메라 화질이 낮아짐으로 조명환경을 개선 제안(글번호 :186195)

❍ 제안 요청일 : 2019. 12. 16.

□ 브리핑 룸 현황

❍ 방송환경 현황

- 서울시 브리핑 룸은 정책발표자와 기자 및 방송카메라 장비 등이 함께 있는 장소이나, 방송환경은 고려되어 있지 않음

- TV 화질이 높아짐에 따라 방송환경에 맞게 브리핑 룸 개선 필요

- 브리핑 룸은 TV 화면에 발표자의 음영이 발생하고 있고 어두운 조명환경으로 방송카메라에 맞는 특수조명 설치가 필요

❍ 브리핑 룸 사용현황(2019년)

구 분	사용 횟수/년
브리핑 룸	92회(주 1.7회 정책발표)

- 서울시 정책발표가 많은 점을 감안 시민들에게 양질의 화질을 제공할 수 있는 방송환경 개선 필요

□ 시민제안에 따른 개선방안

❍ 방송카메라에 맞는 특수 조명기구 설치

- 다양한 환경에서 조도(밝기) 및 색온도(조명 색) 조절이 가능한 조명기구를 설치하여 고화질 방송이 될 수 있도록 환경개선

❍ TV 화질에 그림자 및 음영이 없도록 방안 강구

- 일반 조명기구를 낮은 천장에 설치 시 그림자 발생 및 미관저해

- 음영 발생이 없도록 천장 및 앞면에 조명기구 설치

❍ 평소에는 기자 사무실로 사용, 발표 시에는 브리핑 룸으로 활용

- 브리핑 룸은 평소 기자 사무실로 사용하고 있으므로 조명기구로 인해 미관이 저해되어 업무가 방해되지 않도록 설치

- 움직이는 특수조명을 설치하여 사용 시에는 조명이 무대를 향해 내려가 비추고, 평소에는 천장으로 닫혀 눈에 보이지 않도록 설치

□ 세부 설치계획

❍ 방송용 조명기구 설치 개요

장 소	2층 브리핑 룸
목 적	TV 방송용 카메라용
설치수량	8개
설치위치	발표장소 천장 및 앞면
기 능	디밍(밝기) 및 색온도 조절, 전동기능

❍ 설치기간 : 2020년 2월 중(2~3일 작업소요)

- 정책발표 및 회의실 사용을 감안 주말 작업 시행

❍ 협의기관

- KBS 왕인흡기자, YTN 최용호기자

- 대변인실 방송팀 이정윤주무관, 신문팀 이수미주무관

❍ 조명기구 설치위치

- 발표장소 및 포토 존 방향의 천장면

현장 사진	2층 브리핑 룸 조명기구 위치

❍ 방송용 특수 조명기구

- 낮은 천장고에 맞는 열고 닫히는 특수 조명기구 설치

- 밝기 및 색온도 조절이 가능한 컨트롤러

브리핑 룸 디밍 컨드롤러	전원부

□ 기대효과

❍ 고화질 TV에 맞는 방송현장 구현

- 특수 조명시설 설치에 따른 밝은 방송현장 구현

- 다양한 방송카메라에 맞는 밝기 및 색온도 조절 가능

- 낮은 천장고에 맞추어 열고 닫히는 전동 조명기구 설치

❍ 평소에는 기자 사무실로, 발표 시에는 브리핑 룸으로 활용

- 열고 닫히는 전동 조명기구로 시각적으로 불편하지 않은 브리핑 룸 제공

❍ TV 방송 시 보조 조명기구 설치가 필요 없음

- 특수 조명기구 설치에 따른 별도의 보조 조명기구가 필요 없음

❍ 기념사진 촬영 등 포토 존을 위한 조명기구 설치

- 영상회의실의 사진촬영을 위한 조명기구 설치

□ 구매방법 및 소요예산

❍ 조명기수 설치공사 : 수의계약

- 금액이 소액이고 특수 조명기구 설치에 따른 수의계약

❍ 소요예산 : 13,887천원

❍ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비