문서번호	도로보수과-1525
결재일자	2020.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅	양기승	02/18 송만규
협 조
	주무관		이석연

2020년 굴착복구사업 추진계획

2020. 2.

동부도로사업소

(도로보수과)

<안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한>

2020년 굴착복구사업 추진계획

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 포장도로의 굴착복구 공사에 대한 사업 추진계획을 수립하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함.

	1		추 진 방 향

❍ 안전하고 쾌적한 도로․교통환경 제공으로 대시민 행정서비스 향상

❍ 시민을 최우선으로 생각하는 효율적 업무 추진으로 공사중 시민        불편 최소화 및 예산 절감

	2		굴착복구기금 재배정 현황

(단위:천원)

구 분	계	직접복구비	간접복구비	비 고
도로굴착복구 기금	7,046,000	7,046,000	0	2.13. 배정완료

	3		사업추진 기본방향

❍ 도로 유지관리 측면을 고려하여 가급적 차로단위복구 시행

❍ 소규모 굴착구간은 표층확폭복구 시행으로 공용수명 연장 도모

❍ 1등급 아스콘 확대 사용으로 품질제고 및 공용수명 연장 도모

❍ 원인자복구 확대 시행으로 과다 설계변경 지양

❍ ‘폐아스콘 처리용역’과 ‘노면표시 도색공사’는 별도 분리발주

	4		공사 발주방법 검토

□ 발주방법 비교 검토

분 리 발 주	단 일 발 주
【장점】 ○업무 신속성 증가( 동시다발적 공사 가능) ○민원 신속 대처( 이동거리 단축, 조기 응대) ○건설사업자간 경쟁유도로 시공품질개선 ○건설사업자 참여기회 증가 【단점】 ○제경비 요율증가에 따른 공사비 증 • 일반관리비 5~30억 5.5%, 30~50억 5% ○행정효율성 저하 • 시스템입력 혼란 및 업무량 대폭 증가 • 굴착원인자 안내(협의) 혼선 • 예산 효율적 집행 곤란(관급비, 노면표시, 폐아스콘) ○현장사무실/창고 부지확보 곤란 • 보조/혼합기층재 등의 적치장소 필요 • 굴착원인자 안내 및 협의에 사무실 반드시 필요 • 공사계약일반조건에 따라 발주자가 부지 제공 - 미 제공시 임대료지급 등 추가 예산 소요 • 도심지에서 부지확보 곤란 • 사업소 전면 유휴부지는 장소협소, 민원발생 우려 ○공사현장 산재에 따른 관리감독 공백 우려 • 동시다발적 공사 진행시 한정된 건설사업관리자 배치가 아려워 관리김독 공백이 우려됨	【장점】 ○분리발주시 보다 예산절감 효과 발생 • 일반관리비 5~30억 5.5%, 30~50억 5% ○행정효율성 증가 • 시스템입력 원활 및 업무량 대폭 감소 • 굴착원인자 안내(협의) 원활 • 예산 효율적 집행 가능(관급비, 노면표시, 폐아스콘) ○현장사무실/창고 부지 효율적 사용 • 보조/혼합기층재 적치, 폐아스콘적치 추가 확보 불필요 및 추가 예산투입 불필요 ○공사현장 관리감독 공백 최소화 가능 • 굴착물량 조정으로 시공품질저하 우려 최소화 (건설사업관리자 투입인원 조정) 【단점】 ○업무 신속성 저하(동시다발적 공사추진 장애) ○민원 신속 대처 미흡(이동거리 증가, 처리 지연) ○시공품질 개선효과 미흡 ○건설사업자 참여기회 감소

□ 검토결과

❍ 발주방법 : 행정효율성 제고 및 예산절감, 현장사무실 부지확보 어려움, 공사현장 관리감독 공백 최소화 등 현실적인 여건을 감안하여 단일발주 추진이 타당한 것으로 사료됨(타 사업소 모두 단독발주 추진)

❍ 품질개선 및 민원신속응대 방안

- 굴착원인자(한전,통신 등) 교육 실시 및 분기별 합동점검 실시

- 건설사업자 24시간 출동체제 구축(공사설명서에 명기, 착공시 인원 및 장비 검토)

	5		공사별 세부 추진계획

□ 예산 사용 계획

(단위:천원)

합 계	굴착복구 공사	노면표시 공사	폐아스콘 처리	기타(맨홀정비 외)
7,046,000	6,010,880	370,000	340,000	325,120

□ 사업별 공사 세부추진 일정

사 업 명	설 계	일상감사	발 주	계 약	착 공
굴착복구공사	’20.02.19.	’20.02.26.	’20.02.27.	’20.03.13.	’20.03.18.
노면표시 도색공사	’20.02.19.	비대상	’20.03.02.	’20.03.20.	’20.03.25.
폐아스콘 처리용역	’20.02.19.	비대상	’20.03.02.	’20.03.20.	’20.03.25.

※ 계약심사는 계약심사과-22295호(2019.12.23)에 의거 제외 대상임

	5		행 정 사 항

❍ 공사발주 전 일상감사 및 전문공사 발주사업 사전검토 후 시행

❍ 굴착공사 후 포장면과 맞지 않는 불량맨홀은 전문성 확보와 품질관리 등을  위해 ‘불량맨홀 정비공사’에서 일괄 정비 시행

붙임 1) 굴착복구기금 재배정내역서 1부.

2) 2020년 도로굴착 심의 조정 현황 1부.

3) 설계도서 각 1부.

4) 공사설명서 1부.  끝.