문서번호	투자창업과-2009
결재일자	2020.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	투자환경개선팀장	투자창업과장
윤인석	나일청	02/18 송광남

- 인베스트서울센터 -

리모델링 공사 2차 설계변경 보고

2020. 2.

투자창업과

(투자환경개선팀)

인베스트서울센터 리모델링 공사 2차 설계변경 보고

인베스트서울센터 조성 리모델링 건축공사(기계포함) 관련 여건 변경에

따른 공종 변경으로 인하여 2차 설계변경을 실시코자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 인베스트서울센터 조성 리모델링 건축공사(기계포함)

○ 위    치 : 종로구 종로 38 서울글로벌센터 6층

○ 계약금액 : ***************************

○ 계약기간 : ’19. 12. 16. ~ ’20. 2. 13.(60일)

○ 계약업체 : 대현기건(주)(대표 : 조홍구)

□ 금액 조정

구 분		공사금액	증감액	증감사유
도급비 (준공금액)	당 초	***********	************	바닥공종 변경에 따른 공사비 절감
	변 경	***********

※ 준공기한 5일 지연에 따른 지연배상금 별도 부과 예정

○ 주요 설계변경 사유

- *****************************************************************************

□ 향후 계획

○ 설계변경 계약 의뢰(재무과) : ’20. 2. 18.

붙 임 : 1. 변경계약 합의각서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.