문서번호	급수운영과-2557
결재일자	2020.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
서장원	서규석	이용구		02/19 박영준
협 조
	시설관리과장		고신석
	시설운영팀장		권승계
	급수관리팀장		이일로

2020년 소블록 배급수관망 개선사업 추진 계획
2020년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

2020. 2.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년

소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획을 보고 드림.

사  업  개  요

1

▢ 관련근거 : 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획【누수방지과-1610(‘20.2.7.)】

▢ 사업기간 : 2014년~2023년

▢ 사 업 비 : 8,809백만원

▢ 정비대상 : 140개소

(단위:개소)

구 분	대 상	연차별 추진사항						잔여대상 (‘21~‘23)
		계	~’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
합 계	140	97	34	18	15	20	10	43
단일배관 이중화	18	9	7	-	1	-	1	9
단절관 순환관망	122	88	27	18	14	20	9	34

▢ 사업목적

○ 단일배관 이중화로 무단수 급수체계 구축

○ 단절 구간을 순환관망으로 형성하여 깨끗한 아리수 공급

《 단일배관 이중화 》

《 단절관 순환관망 》

	➡

세부 추진계획

2

▢ 추진실적 및 계획

구 분		계	~‘16년	‘17년	’18년	’19년	’20년	‘21~‘23	비고
계	사업비(백만원)	8,809	1,177	279	882	302	781	5,388
	대상(개소)	140	34	18	15	20	10	43
	연장(m)	11,703	1,400	303	934	328	433	8,305
단일배관 이중화	사업비(백만원)	5,334	860	-	557	-	110	3,807
	대상(개소)	18	7	-	1	-	1	9
	연장(m)	7,704	1,024	-	580	-	114	5,986
단절관 순환관망	사업비(백만원)	3,475	317	279	325	302	671	1,581
	대상(개소)	122	27	18	14	20	9	34
	연장(m)	3,999	376	303	354	328	319	2,319

▢ 2020년 추진계획

○ 소블록 배급수관망 개선(순환관망 형성) : 10개소(947m), 781백만원

○ 구별 정비 대상

구 분	대상(개소)	공사개요		소요예산 (백만원)	비고
		구경(㎜)	연장(m)
계	10	80~300	433	781
관악구	1	200	13	42	순환관망
금천구	2	100~150	30	60	순환관망
동작구	3	80~150	184	257	순환관망 이중화
영등포구	4	80~300	206	422	순환관망

▢ 추진방법

○ 도급액 3천만원 이상 : 단위사업 발주 시행

○ 도급액 3천만원 이하 : 연간단가계약 공사로 시행

향  후  계  획

3

○ 3월초 착공하여 10월말까지 정비완료를 목표로 추진

○ 매월 10일 추진실적 보고 (누수방지과)

붙 임  2020년 사업 추진대상(10개소) 1부.  끝.