문서번호	총무과-5560
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	02/19 김혁
협 조
	주무관			채충일
	주무관			이성철
	주무관			우석식

「본관 에너지저장장치(ESS)」

재가동을 위한 안전조치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  02.

행정국

(총무과)

「본관 에너지저장장치(ESS)」

재가동을 위한 안전조치 계획 보고

본관 에너지저장장치(ESS) 재가동을 위한 안전조치 및 향후 추진계획을 아래와 같이 보고 드림.

1		ESS 설비개요

□ 설비현황

○ 위치 : 본관 지하5층(전기실)

○ 설비용량 :

***********************************

*********************************

○ 주요설비 구성

******	****	****	*****	**
*********** ********	************ **********	*********	**********	*********

***********************************************

○ 사용용도

- 값싼 심야시간에 ESS에 전기를 저장하여 피크시간대 전기를 사용

- 정전·비상시 또는 평시 한전 전기사용을 대신하여 전기공급

※ 심야시간대 ESS 충전을 위한 전력량에 대한 전력량 요금 50% 할인

및 평균 최대수요전력(피크전력) 감축량에 대한 기본요금 할인

○ 설치 현황

**********************************************************

□ 추진경과

○ ’18.07.09. : 계획 수립

○ ‘18.08.03. : 발주 시행

○ ’18.10.01. : 계약 및 착공

○ ‘18.12.26. : 시운전 및 준공

○ ’19. 01~   : 정상 운전

○ ‘19.01.10. : 가동중단(행정안전부 산업교통재난대응과-116)

○ ’19.06.10. : 사고원인 조사결과 및 안전강화대책 발표(산업통상자원부)

○ ’19.11.21. : 전기설비기술기준의 판단기준 개정

○ ’20.02.06. : 추가 안전대책 발표(산업통상자원부)

2		국내 ESS 가동중단 원인

□ 화재사고 발생

○ 화재 발생 건수 : 28건(‘17.08.02.~현재)

- 전국 각지에서 화재 발생(서울 미발생)

- 가동중단 요청 전 발생건수         : 17건

- 안전강화 대책 발표전 발생건수    :   6건

- 안전강화 대책 발표 이후 발생건수 :    5건

□ 화재사고 원인

○ 전기적 충격(과전압,과전류)에 대한 배터리 보호시스템 미흡

○ 결로와 다량의 먼지 등 열악한 환경에서의 운영환경 관리 미흡

○ 배터리 보관 불량, 오결선 등 ESS 설치 부주의시

○ ESS가 하나의 통합된 시스템으로 설계‧보호체계 미흡

○ 높은 충전율 운영방식과 배터리 이상현상 결합

3		안전강화 대책 및 이행절차

□ 안전강화 대책

구 분	내 용	비고
1. ESS 사고원인 조사결과 및 안전강화 대책시행 (‘19.6.10.산업통상자원부)	▪ KC인증 강화(PCS, 배터리) ▪ KS표준 제정(ESS 전체시스템) ▪ 단체표준 채택 ▪ 옥외전용건물 설치 유도 및 안전장치 의무화 ▪ 점검 강화를 통한 운영·관리 단계 안전성 제고 ▪ 소방기준 강화(ESS 특정소방대상물, 화재안전 기준 제정 등) ▪ 공통 안전조치 - 전기적 이상 보호장치, 비상정지장치 설치 배터리 과충전 방지, 운용환경 관리 ▪ 추가 안전조치 - 방화벽 설치(내화구조로 차폐), 타 설비와 이격거리 확보, 자동소화설비 설치
2. ESS 추가 안전대책 시행 (‘20.2.6.산업통상자원부)	▪ 충전율 제한 조치 시행(옥내80%, 옥외90%) ▪ 옥내설비 재사용(re-use)을 통한 옥외 이전 지원 ▪ 모든 사업장에 대한 운영데이터 별도 보관 추진 ▪ 철거·이전 등 긴급명령제도 신설 추진 등

□ 안전조치 이행 절차

안전조치 이행계획 수립	⇒	안전조치 이행	⇒	안전조치결과서 제출
소유주		소유주		에너지관리공단

⇒	안전조치 이행여부 점검 확인	⇒	안전조치 이행 확인	⇒	결과 통보
	전기안전공사,에공단		ESS 안전위원회		에너지관리공단

4		본관 ESS 안전조치 검토사항

□ 안전강화 대책검토

안전 조치사항		항 목	검토내용	비 고
**********	************************	****************	****
		****************	****	*
		***************	****	*
	************** *****************	******************** *******	***	**** ****
		***********************	****	*
	*********** ************	**************************** ********************** ************	**********	*
	*************	**********************	***	**** ****
	*********	********************* **********************	***	**** ****
	*******	************************ ****************	***	**** ****
	***********	*********************	***	**** ****

□ 추가 안전대책 검토

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

5		조치계획

□ 안전조치 계획

○ 안전조치에 따른 공사, 구매에 소요되는 비용은 분야별 연간단가 또는 청사         관리 시설비 및 공공운영비 사용

*******************************

******************************************

*********************************

**********************************************

********************************

***********************************************

□ 세부추진 일정

○  ‘20.04. : 안전조치 이행 완료

○  ‘20.05. : 안전조치 이행결과 제출(에너지관리공단)

○  ‘20.06. : 안전조치 이행결과 확인 및 최종 승인(안전관리위원회)

○  ‘20.07. : 안전조치 이행 승인 통보시 가동

붙임 1. 안전강화 대책(산업통상자원부) 2부.

2. 공통 안전조치 및 이행절차 1부.  끝.