문서번호	시설개선과-1475
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이재상		윤정한	02/19 김정열
협 조
	주무관			황인정

잠실야구장 기계설비 정비공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 2.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 기계설비 정비공사 추진 계획

우리과에서 추진하는 『잠실야구장 기계설비 정비공사』를 아래와 같이 시행하여 이용객 편익제공 및 시설물관리에 만전을 기하고자 합니다

1		사업근거

□ 2020년 잠실야구장 시설물 개선 요청 (잠실야구장 운영본부 2019.07.02)

□ 2020년 세출예산 사업

□ 사업필요성

❍ 노후된 공기조화기로 냉난방시 성능이 현저히 떨어져 이용객 민원 발생

❍ 냉방설비 노후 및 미설치된 화장실 있어 이용객 민원 발생

❍ 3층 화장실 급수 수압 낮음으로 인한 민원 발생

- 급수 공급 방식을 기존 고가수조에서 부스터 펌프 방식으로 변경

□ 시설물 현황

스팀헤더			저수조
식당 공기조화기	급탕 온수 환수관 밸브 및 배관			그라운드 스프링클러 펌프

2		공사추진개요

□ 공 사 명 : 잠실야구장 기계설비 정비공사

□ 사업기간 : 착공일로부터 ∼ 04. 30.

□ 사업내용 : 잔디 스프링클러 펌프 1SET, 화장실(2, 3층) 에어컨 설치 44대, 공기조화기 1대, 급수배관, 스팀배관 등

❍ 급수공급 방식 변경(물탱크 70ton, 부스터 펌프 5.5kw×3대 추가 설치)

□ 소요예산 : 249,610천원 (도급비 115,550천원, 관급비 134,060천원)

□ 계약방법 : 제한경쟁, 관급자재 조달구매

□ 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확중(체육진흥기금), 야구장 시설개보수, 시설비및부대비, 시설비

3		추진일정

□ ‘20. 02. 19. : 발주방침

□ ‘20. 02. 24. : 공사발주

□ ‘20. 03. 06. : 공사계약 및 착공

□ ‘20. 04. 30. : 공사준공

4		조치사항

□ 2020년 프로야구 시즌 전 일부 공사 완료를 위해 긴급 발주 시행

붙임  설계도서(시방서, 도면, 내역서) 1부.  끝.