문서번호	도시철도설비부-1799
결재일자	2020.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	송변전과장	도시철도설비부장	도시철도국장
문학준	백성현	김영수	02/19 김진팔
협 조

스마트기술 활용, 안전하고 편리한 고품격 도시인프라 조성!!!

서울시↔경기도

도시철도 건설관련 간담회 개최결과 보고

2020. 2.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

서울시↔경기도

도시철도 건설관련 간담회 개최결과 보고

도시철도 건설(5호선연장, 8호선연장)관련 원활한 사업추진과 성공적 개통을 위하여 시행관청인 경기도와 상호 협업을 위한 간담회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 간담회 개요

○ 일   시 : 2020.2.14.(금) 14:30 ~ 16:00

○ 장   소 : 경기도 철도건설과(본관 1층 회의실)

○ 참 석 자 : 총 12명

- 서울시 : 도시철도설비부장, 송변전과장, 차량과장, 정보통신과장, 신호과장, 담당주무관

- 경기도 : 철도건설과장, 건설정책팀장, 건설1팀장, 건설3팀장, 설비팀장, 담당주무관

○ 개최목적 : 서울시↔경기도간 도시철도 건설관련 원활한 사업추진과 성공적 개통을 위한 상호 협조체계 구축

□ 도시철도 건설 추진 현황

○ 도시철도 하남선(5호선 연장) 건설사업

- 사업개요

․ 사업구간 : 강동구 상일동(상일동역)~하남시 창우동

․ 사업규모 : 총연장 7.7㎞(서울시 1.1, 하남시 6.6), 정거장 5개소

․ 사업기간 : 2012년~2020년

․ 총사업비 : 1,703억원 (설비분야)

(단위:억원)

계	시스템분야				기계 (사업비 확정)
	전기	통신	신호	차량
1,703.6	453.9	299.9	276.1	492.4	181.3

※ 차량구매수량 : 32량(8칸/4편성), 차량 개량 : 608량(8칸/76편성)

- 서울시 사업범위

분야별	사업범위
	설계	시공	지급자재
송변전·전차선, 통신, 신호	전구간	전구간	전구간
토목 및 정거장 기계,전기	서울시 구간	서울시 구간	서울시 구간

○ 도시철도 별내선(8호선 연장) 건설사업

- 사업개요

․ 사업구간 : 강동구 암사동(암사역)~남양주시 별내동

․ 사업규모 : 총연장 12.91㎞(서울시 2.43, 경기도 10.47), 정거장 6개소

․ 사업기간 : 2006년~2023년

․ 총사업비 : 2,450억원(설비분야)

(단위:억원)

계	시스템분야				기계 (사업비 확정)
	전기	통신	신호	차량
2,150.7	526.5	305.6	407	756	155.6

※ 차량구매수량 : 54량(6칸/9편성), 차량 개량 : 120량(6칸/20편성)

- 서울시 사업범위

분야별	사업범위
	설계	시공	지급자재
송변전·전차선, 통신	전구간	전구간의 1/2	전구간
신호	전구간	전구간	전구간
토목 및 정거장 기계,전기	서울시 구간	서울시 구간	서울시 구간

□ 간담회 내용

○ 서울시 요청사항

- 하남선

․ 원활한 1단계 개통을 위해 사전점검 지적사항 조치 협조

․ 영업구간내 비산먼지 유입 방지를 위해 물청소 실시

․ 통합환승할인 요금제적용을 위한 개통일 확정 요청(3개월 전)

- 별내선

․ 전력원격제어설비 및 기계분야 자동제어 구성방식 등에 대하여 운영사(서울교통공사)와 동일한 시스템 적용(시스템 호환 및 유지관리 일원화)

․ 시스템 분야 업무구분(건설사업 업무협약서)에 따른 상호 긴밀한 협조 유지

○ 경기도 답변내용

- 사전점검 지적사항(토목 1, 기계 7) 처리 완료 및 1건 조치 중

※ 3공구 승강장 추락방지 시설 설치 완료 예정(2.26)

- 물청소 실시 예정(1단계 구간 3월초, 2단계 본선 물청소 완료 1월)

- 자동요금징수설비 구축을 위한 수도권 교통운영기관과 협의 추진 예정

- 별내선 공사 추진 적극 협의

․ 시스템분야 통합감리 발주 : 향후 실무자 협의를 통해 적극 추진

․ 운영사 요구사항(기계분야 자동제어) 반영을 위해 서울시와 협조하여 총사업비 조정 협의 추진(약 20억원 추가 소요)

□ 향후 계획

○ 원활한 사업추진과 성공적 개최를 위하여 상호 협의의 장 지속 마련

○ 우리본부 도시철도설비부에서 개최 예정인 운영기관 합동워크숍 참석 등 교류 협력 적극 추진

○ 개별 사업 사안별 실무자 업무협의체 마련

첨부 1. 간담회 회의 자료(서울시, 경기도) 각 1부.

2. 참석자 명단(서울시, 경기도) 1부. 끝