문서번호	시설과-480
결재일자	2020.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
김재희	하종식	02/17 박종수
협 조

『시민의숲 시설물 정비사업 실시설계용역』

기간 연장 검토 보고

2020. 2.14

동부공원녹지사업소

(시설과)

『시민의숲 시설물 정비사업 실시설계 용역』

기간 연장 검토 보고

「시민의숲 시설물 정비사업 실시설계 용역」에 대하여 기간 연장하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

개    요

❍ 용 역 명 : 시민의숲 시설물 정비사업 실시설계 용역

❍ 용 역 비 : 금15,796,000원

❍ 기    간 : 2020. 1. 21 ~ 2. 19

❍ 용 역 사 : 주식회사 조경이십일  대표 강정옥

검토내용

❍ 사    유

- 배수관 상태 점검을 위한 CCTV 검사에 시일 소요

- 시민의숲 관리사무소 및 화장실 신축공사에 따른 건물 주변 조경공사 추가 과업으로 인해 용역 기간 부족

❍ 준공기한 연기

당 초	변 경	연 기
2020.1.21 ~ 2.19	2020.1.21 ~ 2.29	10일

❍ 검토의견

- 용역 기간을 연장하여 충실한 설계안을 작성하고 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

조치계획

❍ 실정사항을 반영하여 준공기한 연기 요청(→공원운영과).  끝.