문서번호	목동사업과-1469
결재일자	2020.2.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		목동사업과장		체육시설관리사업소장
박병규		이종섭		02/17 김정열
협 조
	운영기획과장				김남대
	주무관				황미령
	주무관				이동열

『목동운동장 맨홀 정비공사』

실시설계용역 및 공사발주 계획 보고

2020. 2.

체육시설관리사업소

목동사업과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『목동운동장 맨홀 정비공사』

실시설계용역 및 공사발주 계획 보고

목동운동장내 노후화 된 맨홀 콘크리트 구조체의 보수․보강과 부식(파손) 된

맨홀뚜껑을 교체하고 맨홀주변 평탄성을 확보하여, 운동장내 배수시설을 원활하게 하고

하수 및 우수관로 유지관리의 효율성을 높여 이용객에게 안전하고 쾌적한 환경을 제공코자 함.

Ⅰ		근 거

도로상 맨홀정비 및 관리지침(2016.7.20.)

Ⅱ		현 황

맨홀 콘크리트 벽체 및 이음부는 노후로 인하여 파손되어 보수․보강이 필요함.

맨홀뚜껑 및 철개는 노후로 인하여 부식되고 부분 파손되어 교체가 필요함.

맨홀뚜겅 침하로 주변 아스팔트와의 단차로 인한 평탄성이 저하되어 보수가 필요함.

벽체 콘크리트 파손	맨홀철개 파손	맨홀침하로 평탄성 불량

Ⅲ		개선계획

맨홀 벽체 콘크리트 및 이음부 파손 등 결함에 대해서는 용역 조사 결과에

따라 보수․보강 조치하고자 함.

부식되고 파손 된 맨홀뚜껑 및 철개는 교체 설치코자 함.

맨홀뚜껑과 주변 포장면의 단차로 평탄성이 불량한 곳은 보수 조치코자 함.

Ⅳ		발주계획

실시설계용역

용 역 명 : 목동운동장 맨홀 정비공사 실시설계 용역

용역기간 : 착수일로부터 60일

소요예산 : *********

용역내용

- 맨홀 초기점검 및 보수․보강 설계

- 점검 결과에 따른 맨홀 내․외부 조사표 작성

- 불량 맨홀뚜껑 교체

- 맨홀주변 배수불량 및 침하구간에 대한 맨홀인상, 배수시설 검토

- 맨홀내부 콘크리트 이음부 및 손상구간 보수․보강 설계

- 기타 이에 따른 복구공사 설계

계약방법 : 수의계약

수의계약 사유

- 본 용역은 목동운동장 맨홀 정비공사에 따른 실시설계 용역으로 추정가격이 소액이고,

- **********************로서 현장 이해도가 높고 설계 경험이 풍부한

업체 중 견적 검토 결과 저가를 제시한 업체와 수의 계약을 하고자 함.

법적근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 1항 5호

(추정 가격이 2천만원 이하인 용역계약) ※서울특별시1.5천만원이하

목동운동장 맨홀 정비공사

공 사 명 : 목동운동장 맨홀 정비공사

공 사 비 : 실시설계용역 결과 및 허용예산 범위 내에서 추진 예정

공사기간 : 착수일로부터 90일

계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)

입찰참가자격 : 건설산업기본법시행령 제7조(건설업의 업종 및 업무내용)의 규정에 의한『********』에 등록한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

하자보증기간 : 준공검사일로부터 3년

***************

예산과목 : 시민체육시설 운영 및 유지관리, 노후 체육시설 개보수사업,

목동운동장․신월야구공원 시설 개․보수, 시설비

Ⅴ		추진일정

2020년 2월 ~4월: 실시설계용역 자체 심사 및 실시설계용역 시행

2020년 5월 : 공사 계약 및 착공

2020년 8월 : 공사 준공

붙임 : 실시설계 용역 설계내역서 및 과업내용서 각 1부.  끝.