문서번호	시설보수과-620
결재일자	2020.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	02/18 정훈모
협조
	주무관		이석근

소화조 정밀점검 및 실시설계 용역 시행계획

2020. 02

중랑물재생센터

(시설보수과)

소화조 정밀점검 및 실시설계 용역 시행계획

노후화(콘크리트 열화, 탈락 등)된 소화조, 저류조 보수를 위한 안전점검 및 실시설계를 시행, 보수·보강하고 향후 원만한 기능유지를 위한 유지관리계획 수립이 필요하여 용역을 시행하고자 함.

1		추진배경

□ 노후화된 소화조, 저류조의 물리적, 기능적, 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사 측정하고, 보수·보강 등 방법을 제시, 신속하고 적절한 조치를 취하여 원만한 기능유지를 하고자 실시설계 용역을 추진코자 함

2		용역개요

□ 용 역 명 : 소화조 정밀점검 및 실시설계용역

□ 용역개요 : 소화조 2개소, 농축기동 저류조 4개소
- 제2처리장 소화조 1개소 : 3,630㎥, D=23m, H=13m

- 제3처리장 소화조 1개소 : 9,900㎥, D=29m, H=15m

- 농축기동 저류조 4개소

• 농축기동 유입슬러지 2개소 : 1개소당 290㎡

• 농축기동 농축슬러지 2개소 : 1개소당 158㎥

□ 용역기간 : 착수일로부터 2020. 12. 31.

□ 소요예산 : 45,100,000원

3		용역 추진방향

□ 노후화된 소화조, 저류조를 정밀점검하여 적정한 보수·보강 공법 선정

□ 원만한 기능유지를 위한 유지관리계획 수립

3		세부 추진일정

□ 2020.02. : 기술용역 타당성 심사요청

□ 2020.03. : 용역발주, 계약 및 착수

□ 2020.12. : 용역준공

붙임 1. 설계서 1부.

2. 용역설명서 1부.

3. 과업지시서 1부.

4. 위치도 1부.  끝.