문서번호	공원녹지정책과-2965
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원녹지기획팀장	공원녹지정책과장
김근주		한정훈	02/19 하재호
협조

- 기존 도시자연공원 도시관리계획 변경(안) 수립용역(2차) -

용역기간 연기 검토보고

2020. 2.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

- 기존 도시자연공원 도시관리계획 변경(안) 수립용역(2차) -

용역기간 연기 검토보고

장기미집행 공원 일몰대비 도시관리계획 변경을 위해 시행중인「기존 도시자연공원 도시관리계획 변경(안) 수립용역(2차)」에 대한 용역기간 연기 검토보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 기존 도시자연공원 도시관리계획 변경(안) 수립용역(2차)

○ 용역기간 : 2019. 6.18. ~ 2020. 2. 20.

○ 계약금액 : 235,400천원

○ 계 약 자 : (재)선진엔지니어링건축사사무소 대표 유태원

□ 용역기간 연기

○ 기    간

- 당초 : 2019.6.18.~ 2020.2.20

- 변경 : 2019.6.18.~ 2020.6.30

○ 연기사유 : *************************************************************************************************

□ 향후계획

○ 용역기간 연장 계약의뢰 (재무과).

붙임 : 용역기간 연장요청 공문 1부.   끝.