문서번호	여의도공원관리사무소-339
결재일자	2020.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	원장	여의도공원관리사무소장		서부공원녹지사업소장
고우용	유재원	나경민		02/20 남길순
협 조

선유교 입구 장애인 램프 재정비 공사 계획

2020. 2.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

선유교 입구 장애인 램프 재정비 공사 계획

선유교 입구에 위치한 장애인 램프의 목재데크 상판 및 장선이 노후된 실정으로 보수정비를 시행하여 보행안전 사고위험을 예방하고자 함

□ 추진배경

○ 노후된 목재데크 장선 부식 및 상판 마모로 인한 보행안전 사고 위험

□ 공사계획

○ 기    간 : 2020. 2. ~ 6.

○ 위    치 : 선유교 입구 장애인 램프 및 전망 데크 등

○ 내    용 : 노후 목재 데크 장선 및 상판 교체 등

○ 규    모 : 목재 데크(300㎡)

○ 소요예산 : 금100,000천원

− 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경․생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 시설비(100,000천원)

※ 기술용역 자체시행 설계도면 작성비 : 2,500천원(시비 재배정)

□ 추진방법

○ 설계도면 작성비 활용하여 조경전문 설계업체 도면작성 용역시행

○ 조경시설물설치 전문업체 선정하여 정비공사 시행

□ 추진일정

○ ’20. 1. 13. : 자체시행 설계도면 작성비 재배정 요청(선유도공원 → 시)

○ ’20. 2.  7. :  재배정 통보(시 → 선유도공원)

○ ’20. 2. 21.~ 3. 31. : 자체설계 및 도면작성

○ ’20. 4.  1.~ 6. 30. : 공사 시행

□ 기대효과

○ 보행 안전사고 예방 및 목재데크 미관 향상

붙임 : 위치도 및 현황사진  1부.  끝.