“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울 C-ITS 실증사업 관련 노후제어기 교체 일정변경 협조요청

1. 교통정보과-5665호(2019.10.31.)와 관련입니다.

2. 우리 시에서 추진 중인 서울C-ITS 실증사업의 준공기한 연기에 따라 노후 교통신호제어기 교체 일정변경(설계변경)을 요청하오니, 협조하여 주시길 바랍니다.

가. 변경개요(일정변경)

○ 사 유 : 서울 C-ITS 실증사업 준공기한 연기에 따른 제어기 교체 일정 변경

○ 일 정 ┌ 당 초 : 승인일로부터 ~ 2019.12.20.

└ 변 경 : 승인일로부터 ~ 2020.04.30.

붙 임 : 기술검토의견서 등 설계변경문서 2부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시 성동도로사업소장(기전과장)
주무관	김진구		도로정보팀장	代김진구		교통정보과장	02/20 이수진
협조자
시행	교통정보과-2952	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-4963	/전송	02-768-8902	/	realgoo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)