문서번호	시설과-2177
결재일자	2020.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김형식		송병욱	02/20 신용철
협조
	주무관		박건수

「우면산가압장 급수체계 개선공사」

건설공사 계약금액조정실태 순회점검 결과 조치 보고

2020. 2.

상수도사업본부

시설과

「우면산가압장 급수체계 개선공사」

건설공사 계약금액조정실태 순회점검 결과 조치 보고

기술심사담당관의 “건설공사 게약금액조정실태 순회점검 결과통보”의 지적사항에 대해 검토 후 조치계획을 보고 드림.

※ 기술심사담당관-668(2020.1.10.)

사업개요

❍ 규    모 : 양재가압장 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프 교체 7대

송배수관부설 D=1200~1500mm, L=535m

❍ 계약기간 : ’17. 12. 13. ~ ’20. 05. 30 (총차)

’20. 01. 01. ~ ’20. 05. 30 (4차수 진행중)

❍ 도 급 비 : 5,097백만원 (4차수 : 2,271백만원)

❍ 시 공 사 : 국정종합건설㈜ 외 1개사

❍ C M 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

보고내용(건설사업관리인)

❍ 관련공문 : 건설공사 계약금액조정실태 순회점검 지적사항 실정보고

[우면감 제2020 - 053호(’20.02.18.)]

❍ 건설공사 계약금액조정실태 순회점검 지적사항 내용

- 산업안전보건관리비, 환경보정비 증 제경비 정산 부적정으로 공사비 3,280천원 과다 지급

· 산업안전보건관리비 : 2,140,000원, 환경본보전비 : 38,225원

· 과다지급 : 3,280,000원(제경비 포함)

❍ *********************

***	**	***		******		***
		**	***	**	***	**	***
****			*		*		*
**********	*	*	**********	*	**********	*	************
******	*	*	**********	*	**********	*	*********
******			**********		**********		************
******	*	*	*********		*********		**********
***	*	*	**********		**********		**********
****			***********		***********		************
*****	*	*	**********	*	**********	*	**********
****			***********		***********		************
****			***********		***********		************

건설사업관리인 종합의견

❍ “건설공사 계약금액조정실태 순회점검 지적사항”에 대해 금회(4차분)에서 감액토록 설계변경에 반영하고자 합니다.

검토의견(공사관리관)

❍ 건설사업관리인 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차를 이행하고자 함.

붙임 : 실정보고 관련서류 1부.  끝.