문서번호	물순환정책과-3272
결재일자	2020.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
송종봉	유통희	02/20 임춘근

2020년 사평역 주변

지하수 오염조사 및 정화용역 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력현황
	부서명	협의내용	협의결과
서울특별시 계약심사 업무처리규칙	기술심사담당관	기술용역타당성 심사	적정
	감사담당관	일상감사	적정

2020. 2.

물순환안전국

(물순환정책과)

2020년 사평역 주변

지하수 오염조사 및 정화용역 시행 계획

사평역 주변 지역의 악취 저감을 위해 전문기관을 통한 지하수 오염조사 및 정화용역을 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 사평역 주변 지하수 오염조사 및 정화용역

○ 장    소 : 지하철 9호선 사평역 주변

○ 용역기간 : 계약일 ~ 2020. 12. 17.

○ 용 역 비 : ************

○ 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 지하수 및 토양오염 관리, 사평역 주변 지하수오염 조사용역, 시설비

□ 추진경과(2020년)

○ 2020년 사평역 주변 지하수 오염조사 및 정화추진 계획(’20.1.8.)

※ ’10. 2월 악취 발생 이후 ’10. 6월부터 관측정 설치 및 오염지하수 조사 및 정화용역 수행

○ 기술용역 타당성 심사 요청(’20.1.29.) : 물순환정책과 → 기술심사담당관

○ 기술용역 타당성 심사결과 통보(’20.2.13.) : 적정

○ 일상감사 의뢰(’20.2.14.) : 물순환정책과 → 감사담당관

○ 일상감사 결과 통보(’20.2.18.) : 1인견적 수의계약 적정

□ 계약방법

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

○ 계 약 자 : **************

○ 수의계약 근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조제1항제8호사목 및 제30조제1항

☞ 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우 1인견적 수의계약 가능

□ 주요 과업내용

○ 지하수위 관측 : 700회(35공 × 2회/월 × 10개월)

○ 오염지하수 양수처리 : 620톤(위탁 폐기처리)

○ 지하수 시료채취 및 오염도 분석 : 200점

분 석 대 상		내 역	과업량	비고
계			200
BH-1 ~ BH-23(23공)		23공×4회(건기 2, 우기 2)	92
BH-24 ~ BH-35(12공)		12공×2회(건기 1, 우기 1)	24
기설관공(주변관정)		2공×4회(건기 2, 우기 2)	8
정화시험공(2공)		2공×4회(건기 2, 우기 2)	8
양수정	PW-1 ~ PW-2(2공)	2공×4회(건기 2, 우기 2)	8
맨홀	사평역 → 고속터미널역 맨홀 12개소	11개소×4회(건기 2, 우기 2)	44
		1개소(25K960N)×2회	2
집수탱크	배출구 1개소	1개소×4회(건기 2, 우기 2)	4
맨홀	사평역 → 신논현역 맨홀 5개소	5개소×2회(건기 1, 우기 1)	10

- 분석항목 : TCE(트리클로로에틸렌), C-DCE(cis-디클로로에틸렌), T-DCE(trans-디클로로에틸렌), 1,1-DCE(1,1-디클로로에틸렌), VC(비닐클로라이드, 염화비닐), ETH(에틸렌)

○ 화학적 산화공법을 적용하여 정화

□ 추진일정

○ ’20. 3월 : 용역 발주 및 계약

○ ’20. 3월~12.17. :  용역 시행

- ’20. 7월 : 전문가 자문회의(용역추진 중간평가 및 자문의견 수렴)

- ’20.12월 : 전문가 자문회의(용역성과 최종평가 및 향후 추진방향 설정)

○ ’20.12.17. : 용역 준공

붙임  1. 방침서 1부.

2. 과업지시서 1부.

3. 산출내역서 1부.

4. 수의계약사유서 1부.

5. 기술용역 타당성 심사결과 1부.

6. 일상감사 의견서 1부.  끝.