투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[서울의료원 권역의료응급센터 통신공사]

우리 본부에서 시행 중인「서울의료원 권역의료응급센터 증축  통신공사」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울의료원 권역의료응급센터 증축 통신공사(1차)

나. 계 약 자 : ㈜세호영상 대표 박석신

다. 계약변경 내용

구 분	공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경
총 차	2019.03.27. ~ 2020.09.26.	변 경 없 음
1 차	2019.03.27. ~ 2020.02.28.	2019.03.27. ~ 2020.08.31.	(증) 184일
도급비	총차 : 금 589,611,000원 1 차 : 금 250,000,000원	변 경 없 음

라. 예산과목 : 보건의료정책과, 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준향상, 공공의료기관 관리 및 운영 개선, 서울의료원 권역응급의료센터 건립, 시설비.

마. 변경사유 : 의뢰부서(보건의료 정책과) 추가 증축요청에 따른 시공물량 증가로 공기연장

붙임   1. 공사연기 보고서 1부.

2. 동의서  1부.  끝.

	설비부장
주무관	백남진		건축설비과장	김은덕		설비부장	02/21 임정규
협조자	재무예산과장	代서영아
시행	설비부-2608	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)