문서번호	토목과-2168
결재일자	2020.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제88호

주무관		도로관리팀장		토목과장	안전건설교통국장		부구청장		구청장
조장호		조영두		오석관	손경철		한영희		02/22 정원오
협조	정보통신과장		김재경
	계약팀장		임성희
	CCTV통합운영팀장		민상현			기획재정국장		김상집
	도로조명팀장		이천영			재무과장		홍명안

★ ◉

응봉교 앞 보도육교 재설치 공사 시행 계획

2020. 2.

	성 동 구
	(안전건설교통국 토목과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [√] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√]( 서울시 도로시설과 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [√] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [√]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 : 응봉교 앞 보도육교 재설치 공사 착공
	● 중점 홍보사항 - 어린이 통학 등 지역 주민의 보행안전 확보와 편의 증진을 위한 응봉교 앞 보도육교 재설치 공사 착공 홍보
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

응봉교 앞 보도육교 재설치 공사 시행 계획

어린이 통학 등 지역 주민의 보행안전 확보와 편의 증진을 위한 응봉교 앞 보도육교의 재설치 공사 시행 계획을 보고 드림.

□ 추진근거

○ 보도육교 재설치 및 횡단보도 설치 추진계획[토목과-11788(2018.11.9.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명: 응봉교 앞 보도육교 재설치 공사

○ 기    간: 2020. 2. ~ 2020. 6.

○ 위    치: 행당1동 330-2(고산자로, 행당초교 앞)

○ 규    모

- 보도육교 1개소 설치(폭 3.5m, 연장 27.5m, 계단 2개소)

- 편의시설(엘리베이터) 설치 2개소

- CCTV 및 비상벨, 스노우멜팅시스템, 스마트보안등, LED문자형 간판

○ 사 업 비: 1,400백만 원(시비)

□ 추진경위

○ ΄18. 4.13.       재난위험시설물(D급) 지정

○ ΄18. 5.11.       보도육교 철거 추진 계획(구청장 방침 제151호)

○ ΄18. 8. 3.       임시 횡단보도 설치

○ ΄18. 8. 5.       보도육교 철거 완료

○ ΄19.11. 9.        보도육교 재설치 추진계획(구청장 방침 제330호)

○ ΄19. 4.~΄20.1.  실시설계 용역

○ ΄20. 2.17.       서울시 계약심사 결과 통보(서울시 계약심사과)

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

-「서울특별시 공공디자인진흥위원회의」시설 보완 사항과「왕십리 스마트포용도시 전략사업」관련 시설 반영으로 설계금액(1,491백만원)이 확보예산(1,400백만원)을 초과

- 설계금액: 1,491백만 원(초과금액 91백만원)

(단위: 천 원)

공 종 명	합 계	도 급 비	관 급 비	이설비ㆍ이전비
합 계	1,491,000 (91,000)	829,553 (9,700)	628,323 (81,300)	33,124
토목공사	1,424,864 (91,000)	783,707 (9,700)	612,844 (81,300)	28,313
전기공사	42,136	21,846	15,479	4,811
통신공사	24,000	24,000

- 부족 예산 현황: 91백만 원

시 설 명	규 모	소 요 예 산
		91,000천원
자전거경사로(계단)	L=34m	자전거경사로 34m × 285천원 ≒ 9,700천원
방호울타리(보도부)	H=1.2m, L=152m	방호울타리 152m × 179천원 ≒ 27,300천원
스노우멜팅 시스템	B=1.4m, L=27m	스노우멜팅시스템 1식 × 54,000천원 = 54,000천원

○ 대  책

- 부족 예산(91백만원)은 토목공사 이전비에 계약심사 절감액을 포함해서 발주하고 향후 시설공사 낙찰차액 등을 활용하여 추후 설계변경에 반영

※ 서울시 계약심사 절감액: 22,575천원

□ 세부 공사 시행 계획

○ 토목공사(토목과)

- 보도육교 1개소 (B=3.5m, L=27.5m, 강관거더)

- 계단 2개소 (B=1.5m, L=17.1m, L=13.3m)

- 편의시설(엘리베이터 13인승) 설치 2개소

- 스노우멜팅시스템(B=1.4m, L=27m)

- LED문자형 간판 등

○ 전기공사(토목과): LED스탭등 전력 인입ㆍ간선 설비

○ 통신공사(정보통신과): CCTV 및 비상벨 설치

○ 발주금액: 1,400,000천 원(시비)

- 토목공사: 1,333,864천 원(계약심사 절감액 포함)

- 전기공사:    42,136천 원

- 통신공사:    24,000천 원

※ 예산과목: 안전총괄실 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수, 시설비

○ 발주방법: 공종별(토목, 전기, 통신) 별도 발주

□ 향후계획

○ 2020. 2.     공종별 시설공사 발주

○ 2020. 3.~6. 공종별 시설공사 시행

- 토목ㆍ전기공사: 토목과

- 통신공사      : 정보통신과

□ 행정사항

○ 공종별 공사계약 업무 협조: 재무과

○ 통신공사 시행            : 정보통신과

끝.