문서번호	동북권사업과-2038
결재일자	2020.2.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	서울아레나팀장	동북권사업과장
석용균	김순수	전결 02/24 강성욱
협 조

- 창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성사업 -

실무회의 결과 보고

2020. 2.

지역발전본부

(동북권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성사업 -

실무회의 결과 보고

창동일대 도시재생거점(문화시설) 인프라 조성사업 관련 실무회의를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 창동일대 도시재생거점(문화시설)인프라 조성사업

□ 위    치 : 도봉구 창동역 일대 도시재생거점시설 2개소

○ 창동역 서측(창동 135-28, 창동 SR 스타빌 지하) : 262㎡ [공공형 스튜디오]

○ 창동역 동측(창동 5, 다모아빌딩 5층) : 137㎡ [공유 오피스]

□ 사업기간 : 2019. 1. ~  2020.12.

□ 총사업비 : 2,356백만원('20년 예산: 440백만원)

※ 리모델링 설계용역 시행 중('19.10. 8.~'20. 3.24.)

Ⅱ		회 의 개 요

□ 일    시 : '20. 2.20.(목) 14:00~15:30

□ 장    소 : 청계별관 5층 지역발전본부 회의실

□ 참    석 : 11명

○ 동북권사업과(3명) : 서울아레나팀장, 담당 주무관 외 1명

○ 도봉구(8명) : 신경제사업과 팀장 및 담당(4), 건축과 담당, 청년기획자(3)

□ 주요내용

○ 리모델링 설계 용역 진행 사항 검토

○ 공사시행, 물품구매·설치, 개관 등 향후 진행 일정 점검

○ 운영 방법 논의 등

Ⅲ		회 의 결 과

□ 7월 준공 및 개관을 목표로 적극적으로 사업 추진

○ 3. 6.(금)까지 설계도서 작성 완료

○ 서울시 계약심사와 구 일상감사를 병행 실시

○ 구 재무과와 협조하여 긴급 공고(7일)로 공사 발주

□ 프로그램 운영 기본 방향 논의

○ 공공형 스튜디오 및 공유 오피스를 음악 창작 활동 공간으로 창작가 등에 지원

○ 창작네트워크 활성화 및 비즈니스 아카데미 운영

○ 청소년 음악창작 활동 지원 등

*********************************************

*******************************

Ⅳ		향 후 계 획

□ '20. 3.	리모델링 설계용역 완료

□ '20. 4.~7.	리모델링 공사시행

□ '20. 6.~7.	물품구매 및 설치

□ '20. 7.	준공 및 개관

붙임 : 회의자료 1부.  끝.