문서번호	설비부-2649
결재일자	2020.2.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	02/24 임정규
협조

[중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사]

공법기자재 납품기한 연장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.2.

도시기반시설본부

(설비부)

[중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사]

공법기자재 납품기한 연장 검토보고

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」공법기자재 납품기한 연장요청 건에 대한 검토보고임.

1		관련근거

□ 공법기자재 납기연장 요청 검토보고: 중랑감 제20-78호(2020.2.14)

2		공사개요

□ 공 사 명: 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□ 공사규모: 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+비총인 416,000㎥/일(TP 0.18㎎/L) ⇒ 혼합방류(TP 0.46㎎/L)

□ 공사기간: 2017.11.20 〜 2021.1.26.(총차)

□ 공 사 비: 2,398백만원(총차)

3		검토내용

□ 계약상대자: ******************

□ 적용공법: 에코젯그린플러스 가압부상공법

□ 계약현황

구분	총차	1차	2차	3차
****	**************	************	**************	**************
계약일자	2018.3.8.	2018.3.8.	2018.8.1.	2019.3.26
납품기한	2020.2.28.	2019.12.31.	2019.12.31.	2020.2.28.
진행현황		납품완료	납품완료	납품준비

□ 변경내용

구분	계약금액		납품기한
	당초	변경	당초	변경
총차	**************	변경없음.	2020.2.28.	2021.1.31.
3차	**************	변경없음.	2020.2.28.	2021.1.31.

□ 변경내용: 선행공정 지연에 따른 공법기자재(3차분) 반입 및 설치 불가

□ 귀책소재: 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공종인 토목·건축공사의 지하구조물 설치공정 지연으로 2020.2.28.까지 공법기자재 반입 및 설치가 불가한 실정임.

- 공법기자재는 시설물과 일반기자재 등과 연계되어 정밀운전이 필수적이므로 각 시설별 연동시험과 수질보증 의무를 고려할 때 종합시운전 완료시험인 2021.1.31.까지 납품기한을 연장함이 타당하다고 사료됨.

4		조치계획

□ 건설사업관리기술자 검토내용이 적정하다고 판단되어 현장여건에 맞게 공법기자재의 납품기한(총차, 3차)을 위와 같이 연장하고자 함.

붙임 : 공법기자재 납기연장 요청 검토보고(건설사업관리단) 1부  끝.