문서번호	소방행정과-2256
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김성용	윤진욱	원병연		02/25 민춘기
협 조

쾌적한 근무환경 조성을 위한
청사 내 화장실·샤워실 환경개선공사 계획

강서소방서

소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 쾌적한 근무환경 조성을 위한 -

청사 내 화장실·샤워실 환경개선공사 계획

청사 내 노후된 화장실·샤워실 환경개선공사를 통해 시설 안전성을 확보하고 민원인 및 직원들에게 청결한 환경을 제공함으로써 소방 이미지 제고 및 쾌적한 근무환경을 제공하고자 함.

1		관련근거

본부 소방행정과-1799(2020.1.20.)호 “2020회계연도 기관별 예산배정계획서 통보(알림)”

소방행정과-782(2020.1.21.)호 “2020년 강서소방서 보수·보강 사업 기본계획”

2		추진배경

노후된 화장실·샤워실 내부 타일 탈락 및 누수 발생

노후로 인한 균열이 발생하여 세면대, 타일 낙하 위험

사용빈도가 높은 화장실의 오염이 심각

벽면 타일이 탈락		균열로 인한 낙하 위험		심하게 오염된 바닥

3		추진개요

건    명: 청사 내 화장실·샤워실 환경개선공사

대    상: 본서, 발산119안전센터

사업기간: 2020. 2. 25.(화)~3. 20.(금)

사업예산: ***********************

사업내용

청사 내 화장실 2곳, 샤워실·세면장 3곳 환경개선(총 면적: 64㎡)

장소	공사대상	면적	공사내용
본서	1층 남자화장실 (CPR실 옆)	17㎡	· 타일 및 큐비클 철거(부분) · 칸막이·변기,세면기 등 교체 · 악세서리 및 위생기 설치
	1층 샤워실 및 세면장 (구조대 대기실)	14㎡
	2층 샤워실 및 세면장 (진압1대기실)	18㎡
	2층 샤워실 및 세면장 (진압2대기실)	15㎡
발산	2층 화장실(남자)	-	· 소변기 철거 · 세탁기 고정 틀 설치

노후 및 균열이 발생하여 낙하 위험성 있는 타일·세면대 철거 및 재설치

노후 및 오염된 수전·도기류(변기, 세면기 등) 교체

세면도구 등을 보관할 수 있는 붙박이장 설치

4		계약체결

공사업체

업체명: *******

소재지: ****************************

대표자: *********

예정금액: ***********************

계약방법: 1인견적 수의계약(전자수의시담)

예산과목: 직무환경개선/소방관서시설물유지보수/시설비(401-01)

관련근거

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장(수의계약 운영요령)

지방계약법 제9조(계약의 방법)

지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 마목(수의계약에 의할 수 있는 경우)

5		추진일정

계획수립	2020. 2. 25.

계약체결 및 착공	2020. 2. 26.

공사진행	2020. 2. 26.~3. 15.

검수 및 대금지급	2020. 3. 16.~3. 20.

6		기대효과

쾌적한 근무환경을 재공함으로써 직원들의 복지 증진

노후 시설보수를 통한 안전성 확보

청결한 화장실·샤워실을 통해 위생관리의 용이함

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 시방서 1부.

4. 업체관련서류 1부.

5. 수의계약사유서 1부.

6. 부당계약특수조건 체크리스트 1부.

7. 계약발주단계 체크리스트 1부.

8. 이해충돌 자가진단 체크리스트 1부.  끝.