투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	신상도 지하차도 확장공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	업무지시전(사토장 변경 관련 재검토 요청)

1. 업무지시현장 : 신상도 지하차도  확장공사 극동엔지니어링 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2020-02-24 18:02:56

3. 지 시 내 용

가. 신상도감 2020-53호(2020.2.20.)와 관련입니다.

나. 귀 단에서 제출한 사토장 변경 관련 실정보고 사항을 검토한 결과, 이로 인한 총공사비 증액(*********)이 과다함에 따라 현장 인근 사토장 재조사, 폐토사 및 양질토의 분리 반출 등을 통해 계약금액 내에서 사토장을 변경할 수 있는 방안으로 재검토 요청합니다.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							이시연			방재시설과장					김태중					방재시설부장					02/25 박홍봉
협조자				주무관						김상용
시행			방재시설부-2723									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8764						/전송			02-3708-8756					/	siyeon0907@seoul.go.kr												/	부분공개(5)