문서번호	에너지시민협력과-1323
결재일자	2020.2.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관	에너지지원팀장	에너지시민협력과장
이광희	박월진	02/21 김연지

공동주택 및 공공·상업시설 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업 용역 계약기간 변경계획

2020. 2.

에너지시민협력과

공동주택 및 공공·상업시설 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업

용역 계약기간 변경계획

「공동주택 및 공공·상업시설 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업」용역의 내실있는 과업완료을 위해 준공기한을 연장하여 변경계약을 체결하고자 함

□ 용역개요

○ 계약건명 : 공동주택 및 공공 상업시설 에너지전환 플랫폼 운영방안 수립사업

○ 계약업체 : ㈜레즐러플러스

○ 계약금액 : 금196,075,000원정(금일억구천육백칠만오천원)

○ 계약기간 : 2019.11.8.~2020.2.28

○ 용역내용 : 서대문구 에너지데이터 수집 및 플랫폼 운영방안 수립

□ 용역계약 변경

○ 계약기간 연장

구 분	변경 전	1차 변경 (2019.12.10.)	2차 변경 후	비 고
계약기간	2019.11.8.~ 2019.12.31	2019.11.8.~ 2020.2.28	2019.11.8.~ 2020.4.14	46일 연장
계약금액	196,075천원	196,075천원	196,075천원	변동없음

○ 연장사유

- 공공시설 및 상업시설의 에너지현황 조사 및 데이터 수집이 코로나19 확산으로 인해 중단됨에 따라 내실있는 과업추진 및 완료를 위해 추가 연장 요청

○ 연기사유 귀책소재 : 서울시와 용역수행자 합의에 의함

○ 지체상금 부과여부 : 해당없음

□ 행정사항

○ 변경계약 체결 의뢰(에너지시민협력과→ 재무과)

□ 향후일정

○ 변경계약 체결	: 2020.2월 중

○ 3차 자문단 운영을 통한 과업내용 보완	: 2020.3월 중

○ 최종보고 및 용역준공	: 2019.2월 말

붙임  합의각서 1부.  끝.