투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	계약기간 변경 의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 총인 공법기자재)

우리본부에서 시행 중인「중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사 총인 공법기자재 구매」건에 대해 아래와 같이 계약기간 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

구분		계약번호	계약자	계약금액 (변경없음)	계약기간
					당초	변경
공법 기자재	총차	12192029200	************	**************	‘18.03.08∼ ‘20.02.28	‘18.03.08∼ ‘21.01.31
	3차			**************	‘19.03.26∼ ‘20.02.28	‘19.03.26∼ ‘21.01.31

나. 변경사유: 납품기한 연장(선행공정 지연)에 따른 계약기간 변경

다. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임: 1) 공법기자재 납품기한 연기 검토보고 1부

2) 합의각서 1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	02/24 임정규
협조자
시행	설비부-2665	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8639	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(7)