“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기 의뢰

1. 우리 본부에서 추진 중인 「배수지 등 구조물 관리개선방안 마련 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 배수지 등 구조물 관리개선방안 마련 용역

나. 용역업체 : *********************************

다. 계약금액 : 850,000,000원

라. 계약일자 : 2019.4.30.

마. 준공기한 연기 : 당초 2019.5.2. ~ 2020.2.25.

변경 2019.5.2. ~ 2020.6.30.

바. 귀책소재 : 상수도사업본부

사. 지체상금 부과 여부 : 미부과

아. 연기사유 : 배수지 내부 조사 및 코어채취를 위해 배수지 항 청소시기(상․하반기)에 맞춰 현장조사를 수행함에 따라 배수지 항내부 열화 원인분석 등 과업 내용 검토기간 절대 부족

붙임 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	계획설계과장
주무관	권오정		계획설계과장	02/25 송헌영
협조자
시행	계획설계과-2150	(		)	접수		(		)
우	04505	서울특별시 중구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1475	/전송	02-3146-1429	/	ojung@seoul.go.kr	/	부분공개(6)