문서번호	건축부-3327
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축설계과장	건축부장
남광연	이영욱	02/25 임인구
협 조

「로봇과학관 건립 설계용역」

통합건축 TF회의 결과보고

2020. 2.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「로봇과학관 건립 설계용역」

통합건축 TF회의 결과보고

「로봇과학관 건립 설계용역」 통합건축 TF회의를 실시하고 전문가 자문결과 및 설계용역 과업내용서 변경사항을 검토하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

사업 개요

○ 사 업 명: 로봇과학관 건립사업

○ 위    치: 도봉구 창동 1-25(2,501㎡)

*************************************

**********************************

****************************************

○ 용    도: 문화집회시설(전시장)

○ 총사업비: 307억원(공사비 218억,설계비11억, 감리비22억, 기타 56억)

추진 경위

○ 2017.08.01.: 로봇과학관 건립 기본계획 수립(행정1부시장 방침 제227호)

○ 2018.11.01.: 국제 일반설계공모 공고(도시공간개선단)

○ 2019.02.01.: 당선자 발표[Melike Altinisik Architect(터키), 이하 “MAA”]

○ 2019.03.05.: 설계용역 계약체결 의뢰(경제정책과→도시기반시설본부)

○ 2019.09.26.: 설계용역 계약체결

○ 2019.10.23.: 설계용역 착수보고

○ 2019.12.20.: 계획설계 성과품 접수

○ 2020. 1. 8.: 기본설계 자문회의

Ⅱ		회의개요

일  시 : (1차) 2020. 2. 11.(화) 15:00 ~17:30

(2차) 2020. 2. 19.(수) 15:00 ~17:00

장  소 : 도시기반시설본부 13층 회의실

참 석 자

○ 1차

- 도시기반시설본부 : 건축설계과장, 공종별 담당 주무관

- 경제정책실 경제정책과: 담당주무관

- 도시공간개선단: 설계공모팀장, 담당주무관

- 시립과학관: 전시과장

- 외부 전문가: 건축 M.P.(노은주 위원), 전시 M.P.(최진한 대표)

- 설계자 : ㈜위드웍스애이앤이건축사사무소 대표 권혁찬 외 공종별 설계자

○ 2차

- 도시기반시설본부 : 건축설계과장, 로봇과학관 및 사진미술관 담당 주무관

- 경제정책실 경제정책과: 담당주무관

- 문화본부 박물관과: 담당주무관

- 설계자

‣로봇과학관: ㈜위드웍스애이앤이 건축사사무소 대표 권혁찬 외1

‣사진미술관(당선자): ㈜일구구공도시건축 건축사사무소 대표 윤근주 외3

주요안건

○ 공사비 절감 및 계획설계 자문의견 설계자 조치계획

○ 전시 기본계획 설계 반영 사항

○ 지하주차장 연계방안 및 설계 과업내용 관련 사항 등

Ⅲ		주요 회의 결과 ※세부사항 붙임1 참조

□ 공사비 절감 관련 설계자 조치계획

*******************************************

************************************************

**********************************************

*************************************

***********************************************************************************

***************************************

*************************************************

********************************************

*******************************

□ 계획설계 자문회의 검토의견 조치계획

○ 설계자문회의(’20. 1. 8.실시) 의견 반영하여 설계 진행중

- 기술자문위원 검토의견(60건) 검토 및 반영

***********************

*******************************************************************************************************************

**************************************

*****************************************************************************

**********************************************

□ 전시 기본계획 설계 반영 사항

○ 전시 기본 계획

- 1층(이벤트홀): 기업 이벤트홀 및 쇼룸으로 운영

- 3층(상설전시): 아일랜드형 전시, 주동선을 따라 각 전시실 관람

- 4층(특별전시): 아레나형 전시(신규로봇발표 등), 오픈공간

○ T/F팀 회의 결과

*********************************************

*****************************************************************

******************************

***********************************************************************

□ 지하주차장 연계 방안 검토

○ 사진미술관과 로봇과학관 지하 주차장 각각 이용(2안) 검토

- 로봇과학관-사진미술관 지하주차장 연계는 투자심사 조건으로 결정되었으나, 사업간 6~8개월 시간차 발생으로 로봇과학관 행정 절차지연으로 착공 지연될 우려가 있으며,

- 건물간 연결부위 발생으로 구조적으로 불리하고, 지하층 누수 등 하자 발생 가능성 있어 지하주차장 분리 이용 검토 필요

○ T/F팀 회의 결과: 1안 추진(주차장 연결통로 설치)이 바람직

***************************************************************************************************************************************

**************************************************

****************************************************************

□ 설계 과업내용 조정 관련

********************

************************************************************************************************************

*******************************

******************************************************************************

○ T/F팀 회의 결과: 이견없음

[ 과업내용서(당초) ]		[ 변경 (안)]
****** ****************	********	****** ***********
******** *****************		********** **************
*********** ******		************** *****************
**************** ****************		**************** ***********

※ 제로에너지건축물 인증: 녹색건축물 조성 지원법 제17조

- 대상 : 공공기관이 연면적 1,000㎡ 이상 신축, 재축하는 경우

- 등급 : 제로에너지건축물 5등급 이상(에너지효율등급 1++이상)

□ 운영 부서 검토의견 반영 사항

○ 계획설계도면 운영부서(시립과학관) 검토의견 반영 사항

************************************************************************************************************************

*************************************************************

Ⅲ		행정사항

회의결과 관련부서 통보 및 설계반영

*********************************************************

자문회의 수당 등 소요경비 지출

○ 소요예산 : 180천원

- 자문수당 : 180천원[참석수당(150천원)+사전검토(30천원)]×1명

※ 회의시간 2시간 초과에 따라 5만원 추가 지급

○ 지급방법 : 계좌 입금

○ 예산과목 : 경제정책실, 경제정책과, 활력이 넘치는 경제환경 구축, 지역격차 해소를 위한 균형발전 추진, 로봇과학관 건립, 시설부대비

붙 임 : 1. 위원 자문의견서 1부.

2. 『로봇과학관 건립』 TF회의 개요 및 회의자료 각 1부.

3. 설계자 발표자료 1부.

4. 전시기본계획 발표자료 1부.  끝.